문서번호	시설보수과-4265
결재일자	2014.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
금종융		김찬구	10/14 代송재우
협조

기존 신축이음장치 교체요청 관련 실정보고 검토

(도림천4복개:우안 외 1개소 보수공사)

2014. 10.

남부도로사업소

(시설보수과)

기존 신축이음장치 교체요청 관련 실정보고 검토

[도림천4복개(우안) 외 1개소 보수공사)

『도림천4복개(우안) 외 1개소 보수공사』와 관련 공사 감독중인 시설관리공단에서 기존 신축이음장치 교체필요에 대한 실정보고 검토보고 임.

■ 공사개요

○ 공 사 명 : 도림천4복개구조물(우안) 외 1개소 보수공사

○ 공사기간 : 2014.5.22 ~ 2014.11.17

○ 공사개요 : 교면포장 96a, 신축이음장치보수 155m, 표면보수 468㎡

○ 도급금액 : ￦915,644,300원

○ 시 공 사 : 연단토건(주) 대표  이 정 수

○ 감 독 청 : 서울특별시 시설관리공단 (공사감독1처 성경석)

■ 시설관리공단 실정보고 및 검토내용

【관련공문 : 시설관리공단 공사감독1처-10033호 (2014.10.13)】

가. 현   황

○ 도림천4복개(P105, P109, P113)

- 도림천로상 대림역과 구로디지털단지역 사이에 위치하고 있으며 남부순환로 및 신정교(서부간선로) 연결도로로 차량통행이 많은 구간으로

- 기존 신축이음장치 및 고무재 파손 등 이음부의 누수발생으로 인한 슬래브 하부 조인트 부분 콘크리트 손상으로 복개구조물의 안전을 위해 신축이음장치의 전체 및 일부 교체가 불가피함

○ 봉천천복개(은천교)

- 은천로 입구 교차로로 봉천로상에 위치하고 있으며 편도 3~4차로로 교통량이 많은 구간으로

- 기존 신축이음장치의 후타재 파손으로 인해 오랜 기간동안 전체적인 변형이 진행되고 있어 차량의 안전한 주행성 확보 및 안전사고 예방을 위해 보수가 필요한 실정임

○ 위치도 및 현황사진 (별첨)

나. 손상된 신축이음장치 교체 수량

구 분	위 치	보수유형	보수연장	비 고
도림천4복개	P105	일부교체	L=6.4m	총연장 L=13.5m
	P109	전체교체	L=13.5m	총연장 L=13.5m
	P113	일부교체	L=6.4m	총연장 L=13.5m
봉천천복개	은천로입구 교차로	전체교체	L=53.0m	총연장 L=60.2m 중 L=7.2m 기시행

다. 물량변경(증,감)

○ 도림천4복개 물량 증,감

- 신축이음장치 교체 : 당초 0m → 변경 26.3m (증 26.3m)

○ 봉천천복개(은천교 및 당곡사거리) 물량 증,감

- 신축이음장치 교체 : 당초 155.2m → 변경 207.8m (증 52.6m)

○ 개략공사비 : 87,670천원

라. 시설관리공단 검토의견

○ 상기 구간의 손상된 신축이음장치를 교체하여 복개구조물 안전성 확보 및 차량의 안전사고를 미연에 방지 필요

■ 조치계획

○ 상기구간의 신축이음장치는 이음부의 누수발생으로 인한 슬래브 하부 조인트 부분 콘크리트 손상 및 후타재 파손으로 인해 장기간 전체적인 변형이 진행되고 있음을 감안할 때 신축이음장치 재교체(시공)하는 것이 타당함으로 시설관리공단에 품질관리, 안전관리 철저 등 감독업무에 철저를 기하여 공사 시행토록 통보 조치하고,

○ 공사비 증가분은 추후 설계변경시 공사비 잔액 및 낙찰차액 등 “도림천4복개(우안) 외 1개소 보수공사” 예산 범위내에서 공사비 반영토록 조치

첨부   시설관리공단 실정보고 관련서류 등 1부.  끝.