투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	설계변경 계약 의뢰(남산숲어린이집 녹색자금사업)

1. 시설과-7158(2014.10.14)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 “남산숲어린이집 녹색자금사업”과 관련하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사현황

- 사 업 명 : 남산숲어린이집 녹색자금사업

- 공사기간 : 2014. 7. 30 ~ 10. 15

- 도 급 액 : 금93,598,000원

- 도 급 자 : 현도종합건설(주) 대표 최태진

나. 도급비 설계변경 금액

구 분		금 액 (원)			비고
		계약금액	변경금액	증 감
총 공 사 비		106,576,260	118,457,860	증 11,881,600
도급비	공급가액	85,089,091	84,070,373	감 1,018,718
	부가가치세	8,508,909	8,407,037	감 101,872
	계	93,598,000	92,477,410	감 1,120,590
관급자재비		12,978,260	25,980,450	증 13,002,190

다. 예산과목 : 녹색자금

붙  임  1. 설계변경 시행 내부방침서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 제비율검증 1부.

4. 변경도서(별도송부) 1부.  끝.

	시설과장
주무관	이동헌		주무관	남상국		시설과장	10/14 함석주
협조자
시행	시설과-7167	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관2층	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02)3783-5919	/전송	02)3783-5969	/	oil0824@seoul.go.kr	/	대시민공개