문서번호	토목부-19888
결재일자	2014.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박천용		최광무	10/14 노우성
협조

- 서부트럭터미널앞 지하차도건설공사 -

유지관리부서 추가 요구사항 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

서울특별시도시기반시설본부

( 토 목 부)

- 서부트럭터미널앞 지하차도건설공사 -

유지관리부서 추가 요구사항 조치계획 보고

서부트럭터미널앞 지하차도건설공사는 완공되면 유지관리부서에 인계하여 관리하게 되나, 추가 요구한 사항이 있어 이에 대한 조치계획 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 유지관리부서 추가 요구사항 실정보고[서지(감) 제14-452호(‘14.09.29.)]

※ 강서도로사업소 시설보수과-4628호(2014.6.10.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서부트럭터미널앞 지하차도건설공사

○ 공사규모 : 도로구조개선 L=1.35Km

지하차도 L=1,075m(BOX 740m, U-TYPE 335m)

○ 공사기간 : 2008.03.10 ∼ 2014.10.31.

○ 공 사 비 : 금 820억원(공사비 772, 기타 48)

○ 시 공 사 : 중앙건설(주)외 1개사

□ 감리단 검토

○ 검토내용

- 현 황

∙ 강서도로사업소에서 예비준공검사 결과 향후 유지관리를 위한 전기실 및 제어실 내부의 시설물(점검용 사다리 등받이, 벽체 이중벽 도배, 출입구 변경, 환기구 변경) 설치를 요구 함

∙ 양천구청에서 신설 하수 BOX 개구부에 유지관리용 장비투입구 덮게 설치를 요구 함.

- 검토내용

∙ 집수정 점검용 사다리 등받이 설치(2개소)

※ 향후 시설물 유지관리 점검자의 추락방지를 위하여 반영.

∙ 제어실 벽체 이중벽 및 도배마감

※ 제어실은 당초 무인시스템에서 유인시스템으로 변경됨에 따라 석고판 이중벽 및   도배(방염실크)로 마감하여 근무자의 근무여건 개선.

∙ 전기실 지상 출입구 및 환기구 변경

※ 당초 전기실은 무인시스템으로 운영토록 계획되어 지상 출입구는 개폐가 어려운 구조로 설계되어 옥외출입구(테라코트 마감)를 설치하여 근무자의 진출입이 용이토록 변경하고 환기구 출구부도 서스그릴 마감으로 변경하고 진출입로 콘크리트포장.

옥외출 입 구
환기구

∙ 하수 BOX 유지관리용 장비투입구 덮개

※ 서부트럭터미널 사거리 횡단보도 옆에 설치된 신설 하수BOX 개구부는 유지관리용   장비투입구로 포장면에 위치하여 철판(30mm) 덮개를 설치하여 안전을 도모.

- 공사비 증,감 현황

공 종	당 초	변 경	증,(감)	비 고
직접공사비	-	16,298,482	16,298,482
제 경 비	-	3,577,881	3,577,881
공 급 가 액	-	19,876,363	19,876,363
부 가 세	-	1,987,637	1,987,637
도 급 액	-	21,864,000	21,864,000

○ 감리단 검토의견

- 위 와 같이 검토한결과 유지관리부서 근무자의 근무여건 개선과 원활한 시설물 유지관리를 위해 반영하는 것이 타당하다고 사료되며, 추후 설계변경시 반영하고자 함.

□ 공사시행 협의

○ 우리시 : 신규비목 낙찰율 70.849% 적용.

○ 도급자 : 신규비목은 자재비의 비중이 큰 부분으로서 공사시행에 어려움이 많아 설계가의 100% 적용

□ 조치의견

○ 상기 감리원 검토의견과 같이 승인하고 설계변경시 반영토록 업무지시 하고자 함.

○ 금회 실정보고건은 공사 시행 협의 하였으나 협의 되지않아 신규공종에 대해 공사계약일반조건 제20조 2항에 따라 강제 협의율 85.424% 적용코자 함.

붙 임 : 1. 감리원 실정보고 1부.

2. 유지관리부서 공문 1부.

3. 공사시행 협의 1부.  끝.