문서번호	시설과-7159
결재일자	2014.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
이동헌		함석주	10/14 이용태
협조
	주무관		남상국

시립비전트레이닝센터 녹색자금사업

설계변경사항 검토결과보고

2014. 10.

중부공원녹지사업소

시설과

시립비전트레이닝센터 녹색자금사업

설계변경사항 검토결과보고

시립비전트레이닝센터 녹색자금사업과 관련하여 도급사에서 제출한 설계변경내용을 검토하고 결과를 보고드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 시립비전트레이닝센터 녹색자금사업

○ 위    치 : 성동구 자동차시장길 48 시립비전트레이닝센터 내

○ 공사기간 : 2014. 8. 1 ~ 10. 17

○ 도 급 자 : ㈜동양 대표 정성수

○ 도 급 비 : 139,609,400원

□ 설계변경 검토

○ 변경내용

구분	설계변경(안)	비고
식재공	▶ 현장여건 및 수목생육을 감안하여 교목 물량 상호조정 - 잣나무(H2.5×W1.5) : 8주 → 13주 - 느티나무(H4.0×R15): 6→0주, 느티나무(H3.5*R10): 2→6주 - 배롱나무(H3.0×R10) : 9주 → 3주 - 백목련(H2.5×R8) : 4주 → 0주 - 벚나무(H3.0×B6): 8→6주 - 이팝나무(H3.0×R8) : 2주 → 7주 - 자작나무(H3.0×B6) : 14주 → 10주 - 소나무둥근형(H1.5×W2.0) : 0주 → 2주 ▶ 현장여건(음지,경관) 및 수목생육을 감안하여 관목 물량 조정 - 황금측백(H0.8×W0.5) : 3주 → 15주 - 회양목(H0.4×W0.6): 18주 → 0주 - 회양목(H0.3×W0.3): 700주 → 2,400주 - 박태기나무(H1.2×W0.5): 5주 → 0주 - 자산홍(H0.3×W0.3): 730주 → 500주 - 화살나무(H1.5×W1.2×R6): 0주 → 24주 - 눈주목(H0.3×W0.3): 0주 → 300주 - 산철쭉(H0.4×W0.4): 0주 → 400주 ▶ 현장여건 및 사계절 경관확보를 위해 지피류 물량 조정 - 꽃치자(7치포트) : 20본 → 0본 - 상록패랭이(8cm) : 170본 → 700본 - 수호초(10cm) : 380본 → 800본 - 제라니움(7치포트) : 25본 → 0본 - 아스타(5치포트) : 0본 → 400본 - 청하국(4치포트) : 0본 → 150본 - 잔디(평떼, 0.3×0.3×0.03) : 105㎡ → 190㎡	시설과-7019 (2014.10.8.) 기 보고 및 현장여건에 맞게 변경
시설물	▶ 텃밭주변 및 쉼터를 이용자(센터) 요구에 맞게 물량 조정 - 파고라(3300×3260×2530) : 1개소 → 0개소 - 파고라A(5500×5500) : 0개소 → 1개소 - 파고라(보수, 4312×3382×2684) : 1개소 → 0개소 - 파고라B(4312×3382×2684) : 0개소 → 1개소 - 수납벤치(600×2000×H900) : 3개 → 1개 - 화단벤치(320×1210) : 22개 → 0개 - 수돗가(1200×1200) → 수돗가A(1650×1650) - 수돗가B(850×1250) : 0개소 → 1개소 ▶ 녹지확보를 위한 시설물 물량조정 및 장애인 진출입로 확보 - 데크A(4000×4700) : 1개소 → 0개소 - 데크B(2850×6100) : 1개소 → 0개소 - 데크C(5760×6720) : 0개소 → 1개소 ▶ 현장여건에 맞게 물량 조정 - 장대석(300×1000) : 6개 → 0개 - 실외기받침대(500×300) : 3개소 → 0개소
포장	▶ 녹지확보를 위한 시설물 물량 조정 - 점토블럭(T600) : 74㎡ → 0㎡ - 디딤석(300×400×T70) : 138개 → 0개 - 디딤석-1(300×600×T70) : 0개 → 160개 ▶ 경관향상을 위한 경계 및 포장재료 물량 조정 - 녹지경계석(150×150×1000,직선) : 268.8m → 115.5m - 녹지경계석(150×150×1000,곡선) : 15.8m → 1.4m - 사고석경계(150×150×150) : 0m → 53.6m - 블럭경계(390×190×150) : 0m → 47.3m - 사고석포장(150×150,W630) : 0㎡ → 5.2㎡ - 엘브엣지(L78) : 11m → 16m
부대	▶ 기존 바닥 철거면적 최소화로 조정 - 아스콘철거(T100) : 737 → 621㎡ - 아스콘포장(T100) : 73 → 15㎡ ▶ 녹지대 관리를 위한 상수도 시설 조정(센터측 요구) - 상수관(25A) : 43m → 49m - QC밸브 : 2개 → 1개 - 수도밸브 : 1개 → 2개 - 퇴수밸브 : 0개 → 2개 ▶ 녹지대 원활한 배수를 위해 배수시설 보강 - 집수정A(410×510×600,T5mm) : 0개소 → 1개소 - 집수정B(410×510×940,T5mm) : 0개소 → 1개소 - 맹암거(D100) : 0m → 50m

○ 제경비 정산

구분	설계변경(안)	비고
제경비	▶ 보험료 미사용에 따른 정산(지방자치단체 입찰 및 계약집행기준) -건강보험료: 683,670원 → 0원 -연금보험료: 1,001,375원 → 0원 -노인장기요양보험료: 44,780원 → 0원 -건설기계대여대금지급보증서발급금액: 126,208원 → 0원

○ 설계변경금액

구 분		공 사 비(원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
총 액		146,634,400	161,420,500	14,786,100
도급액	공급가액	126,917,637	143,525,000	16,607,363
	부가가치세	12,691,763	14,352,500	1,660,737
	계	139,609,400	157,877,500	18,268,100
관급자재		7,025,000	3,543,000	3,482,000

□ 보고자 의견

○ 공사중 발생하여 기 보고된 실정사항 및 시설 요구사항 등을 반영하여 위와 같이 설계변경을 시행하고, 추가 소요예산은 본 사업의 집행잔액(낙찰차액, 관급자재잔액) 등을 활용하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 공문(도급사) 1부.

2. 설계변경내용 1부.

3. 변경내역서 1부.

4. 제비율검증 1부.

5. 도면(별첨) 1부.  끝.