문서번호	방재시설부-10241
결재일자	2014.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		정일환	10/14 임춘근
협조
	주무관		강종희

「경의선숲길 공원조성공사」

연남동 및 염리동구간 가설건축물 철거공사

실정보고 승인요청 검토보고

2014. 10

도시기반시설본부

(방재시설부)

『경의선숲길 공원조성공사』

가설건축물 철거공사 실정보고  검토보고

「경의선숲길 공원조성공사」연남동 및 염리동구간 보상완료 가설건축물 철거공사 실정보고에 대한 검토 보고임.

▶ 관련공문 : 경의경춘(감)제2014-673호(2014.10.13)

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : 2013.9 ~ 2016.3

○ 공 사 비 : 11,812백만원

Ⅱ

실정보고 사유

○『경의선숲길 공원조성공사』연남동 종점부 및 염리동 구간에 위치한     가설건축물에 대한 보상협의 완료와 관련, 가설건축물 철거 공사에     대하여 설계에 반영코자 함.

○ 가설건축물 현황

- 연남동 구간

- 염리동 구간

○ 가설건축물 철거내용

- 연남동구간

No	구조 및 규격	면 적(㎡)	발생폐기물	비고
1	가설건축물 (조립식판넬)	52.75	폐콘크리트 혼합생활폐기물	1층 : 52.75㎡ 2층 : 25.50㎡
2	가설건축물 (천막 및 합판 등)	45.60	폐콘크리트 혼합생활폐기물
3	가설건축물 (천막 및 합판 등)	17.50	폐콘크리트 혼합생활폐기물
4	콘크리트포장	138.75	폐콘크리트
소 계		254.60		실측면적

- 염리동구간

No	구조 및 규격	면 적(㎡)	발생폐기물	비고
1	가설건축물 (조립식판넬)	41.4	폐콘크리트 혼합생활폐기물
2	가설건축물 (천막)	67.2	폐콘크리트 혼합생활폐기물
3	콘크리트포장	27.4	폐콘크리트
소 계		136		실측면적

○ 철거공사 수량 검토

구분	단위	수량	산출근거	비고
가설건축물 철거 A	㎡	182.75	가설물 면적 합계 1. 연남동 : 141.35 (52.75+25.50+45.60+17.50) 2. 염리동 : 41.40
가설건축물 철거 B	㎡	67.2	염리동 : 67.2
콘크리트깨기 (폐콘크리트)	㎥	79.63	1. 연남동 1) 가설물 기초(T=0.2m) 2) 콘크리트포장(T=0.25m) 3){(52.75+45.60+17.50)×0.2} +(138.75×0.25)=57.86 2. 염리동 1) 가설물 기초(T=0.15m) 2) 콘크리트포장((T=0.2m) 3) (108.6×0.15)+(27.4×0.2) =21.77
혼합생활폐기물	㎥	239.0	가설건축물 + 내부생활폐기물 연남동 : 138 염리동 : 101
폐기물상차	㎥	318.63	폐콘크리트 + 혼합생활폐기물

○ 철거공사 공사비 검토

구분	규격	단위	수량	단가	금액	비고
순공사비					4,490,123
1) 가설물철거 A		㎡	182.75	9,021	1,648,587	신규단가
2) 가설물철거 B			67.20	3,951	265,507	신규단가
3) 콘크리트깨기	T=30cm 미만	㎥	79.63	17,865	1,422,589	기존단가
4) 폐기물상차	폐콘크리트 혼합생활폐기물	㎥	318.63	3,620	1,153,440	기존단가
2. 제경비					1,579,877
3. 폐기물처리	혼합생활폐기물	㎥	239.0	40,000	9,560,000	신규단가
4. 공급가액					15,630,000
5. 부가가치세					1,563,000
6. 도급액					17,193,000

※ 폐콘크리트 운반비 및 처리비 추가소요(약 4백만원, 별도발주 용역분)

○ 단가적용 검토

· 가설물철거 : 신규단가에 대하여 낙찰율(80.013%)적용

· 혼합생활폐기물 : 관련폐기물(사업장생활폐기물)면허등록업체 대상으로

비교견적(3개사) 단가 적용

Ⅲ

감리단 검토의견

○『경의선숲길 공원조성공사』연남동 및 염리동구간 가설건축물 실정보고에 대하여 검토한 결과, 철거 및 폐기물처리비용에 대한 설계 변경은 타당하고, 철거공사 수량산출 및 단가산정은 적절하게 산정된 것으로 판단됨.

Ⅳ

검토결과

○『경의선숲길 공원조성공사』연남동 및 염리동 가설건축물 철거 실정보고에 대하여 철거공사 수량산출 및 단가산정에 대한 감리단의 의견이 타당하다고 판단되며 설계변경 시 반영토록 승인코자 함.

붙  임 : 감리단 실정보고서 1부.  끝.