다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	신촌이야기 버스박물관 조성사업 용역 계약변경 의뢰

1. 관광정책과-11372호(2014.10.14.) 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ‘신촌이야기 버스박물관 조성사업’ 용역과 관련하여 과업내용, 계약금액 및 계약기간의 변경사항이 있어 다음과 같이 계약을 변경하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 신촌이야기 버스박물관 조성사업

2) 계약기간 : 2014. 7. 18 ~ 10. 17

3) 계약금액 : 금149,800,000원

4) 계약업체 : ㈜에이스페이스마케팅(대표 : 나진철)

나. 계약변경 사항

1) 변경사유 : 신촌이야기 버스컨셉 및 내부 콘텐츠 변경에 따른 시설추가 및 공사기간 확보를 위한 기간연장

2) 변경 세부내역

계약금액	당 초	금일억사천구백팔십만원정(\149,800,000)
	변 경	금일억구천구백구십만원정(\199,900,000)
	증 감	증 오천일십만원정(50,100,000)
계약기간	당 초	2014. 7. 18 ~ 10. 17
	변 경	2014. 7. 18 ~ 12.17

다. 귀책소재 : 서울특별시

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

마. 예산과목 : 문화관광디자인본부 관광정책과, 아시아 최고 관광도시로의 도약, 서울만의 매력적인 관광자원 발굴 및 관광상품 개발, 서울 매력명소 스토리텔링 개발 활용사업, 민간위탁금

붙임 : 1. 신촌이야기 버스박물관 조성사업 용역계약 변경계획 1부

2. 변경 과업지시서 1부

3. 합의각서 1부

4. 산출내역서 1부.  끝.

	관광정책과장
주무관	진옥현		관광자원발굴팀장	김덕환		관광정책과장	10/15 이기완
협조자	계약1팀장	김점선
시행	관광정책과-11409	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문동 5층	/
전화	02-2133-2816	/전송	02-2133-1067	/	zeze6@seoul.go.kr	/	대시민공개