문서번호	급수설비과-6534
보존기간	년
결재일자	2014.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	급수설비과장	급수부장
김형준	김인환	10/15 이상홍
협 조

급수공사 감독대행 주간실적 보고

2014. 10. 15

상수도사업본부

(급수설비과)

급수공사 감독대행 주간실적 보고

상수도공사 시공감독업무 위탁과 관련하여 급수공사 감독대행 주간실적을  검토하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ. 시공감독 위탁현황

□ 위탁개요

○ 위탁대상

- 급수공사 및 인입관 철거 ․ 폐쇄(포장복구 포함) : 39,000건

- 긴급 누수복구공사(포장복구 포함)              : 49,000건

○ 위탁기간 : 2013. 5. 25 ~ 2015. 5. 24

○ 계약금액 : 9,131,891,000원

○ 도 급 자 : (주)이준엔지니어링, (주)건양엔지니어링

□ 인력현황

○ 근무인원 : 31명 (급수공사)

- 상주 : 28명(중급 8명, 초급 20명), 비상주 3명

Ⅱ. 검토회의 및 주간실적

□ 검토회의

○ 일   시 : 2014. 10. 13 (월) 14:10~14:50

○ 장   소 : 급수부 회의실

○ 참 석 자 : 4명 ( 담당 과장, 기술지원감독 대행자 비상주 3명)

○ 회의내용 : 주간실적 검토 및 지시사항 전달

□ 추진 실적

○ 급수공사(상주감독대행자)

- 기 간 : 2014. 09. 29 ~ 10. 05.

구 분		감독대행			현 장 입회율 (%)	부설연장 (m)	시정조치 (건)
		계	현장입회 (건)	사후확인 (건)
금 주		461	448	13	97.20	2,391	8
누계	’14.1.1이후	13,151	13,046	107	99.20	40,718	301
	’13.5.25이후	25,903	25,611	294	98.90	84,120	635

- 시정조치 : 안전 3, 토공 1, 배관 1건, 기타 3건.

○ 포장복구공사(상주감독대행자)

- 기 간 : 2014. 09. 29 ~ 10. 05.

구 분	계			급수공사업체 복구			포장업체 복구
	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)
금 주	199	162	81.40	48	48	100	151	114	75.50
누 계	8,402	7,502	89.20	2,464	2,446	99.30	5,938	5,056	85.20

○ 상주감독대행자 상호 업무지원

- 기 간 : 2014. 09. 29 ~ 10. 05.

구 분	계			사업소 내			사업소간
	계	급수공사	누수복구	소계	급수공사	누수복구	소계	급수공사	누수복구
금주(회)	7	3	4	7	3	4	-	-	-
누계(회)	412	287	125	358	233	125	54	54	-

○ 사업소 순회 지도감독(기술지원감독대행자)

- 기 간 : 2014. 10. 06 ~ 2014. 10. 10.

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
지도감독 (건)	급 수	14	-	2	3	2	2	2	2	1
	포장기타		-	-	-	-	-	-	-	-
시정조치(건)		1	-	1	-	-	-	-	-	-

※ 시정 조치 : 포장복구(CA-2) 단면부족으로 당일 재시공 완료

□ 지시사항

○ 감리수행에 따른 현장 시공확인후 결과를 준공계에 상세히 작성 할 것

○ 공사장 안전관리 철저

○ 공사 주요부분에 대하여 현장 입회를 철저히 하고 입회율을 최대한

올리도록 할 것

따로붙임 : 위탁감독대행 주간실적 각 1부. 끝.