의원 요구 자료 제출

시 행	정보기획담당관-15079	(		)
접 수		(		)
결재일자	2014.10.15.
공개여부	대시민공개
수 신 자	기획담당관

주무관	IT컴플렉스팀장	정보기획담당관	정보기획단장		결재
엄기문	홍성우	김종근	10/15 김경서
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호1349번, 노웅래의원, 안전행정위원회)

따로붙임 :    노웅래(국회)의원 요구자료 1부.  끝.

노웅래의원( 안전행정위원회, 새정치민주연합)

1349. 상암동 IT컴플렉스 관련

1) 최초의 사업계획 혹은 운영계획

2) 현재 진행사항

3) 이 시설과 관련하여 건설업체 등등 모든 외부기관 혹은 회사와

맺은 계약내용

4) 문화부와 협의 내용

5) 현재까지 년도별 자금투자 내역

6) 향후 진행계획

1) 최초의 사업계획 : 첨부( 시장방침 제 421호 2007.7.31.)

2) 현재 진행사항 : 공정률 67%

❍ 내부마감공정 및 장비설치 공사 진행중임

3) 이 시설과 관련하여 건설업체 등등 모든 외부기관 혹은 회사와 맺은 계약내용

시공	대림산업(주) (건축100%,전기50%,정보통신50%,소방50%,기타50%)
	두산건설(주) (전기30%,정보통신30%,소방30%)
	코오롱건설(주) (전기20%,정보통신20%,소방20%,기타50%)
설계	(주)원양 건축사사무소 (50%) , (주)해안 건축종합건축사사무소 (25%) (주)종합건축사사무소 동우건축 (15%) (주)휴다임 건축사사무소 (10%)
	한양전설(주) 전력종합설계 100%
	한방유비스 주식회사 소방 100%
감리	건원엔지니어링 (50%), 정림건축 (50%)
	고라엔지니어링 (전기,통신,소방감리 분담)

4) 문화체육관광부와 협의내용

	주무부서 : 서울시 문화관광디자인본부(문화산업과)
‣ e스포츠 주경기장 규모확대 - 기존의 500석에서 800석으로 확대, 건물 내∙외부 상징성 강화등 ‣ 주경기장 규모 확대에 따른 건축비 160억원 국비 부담(’10~’12년)

5) 현재까지 년도별 자금투자내역

(단위:백만원)

내 용	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	합계
시 설 비	168	13,556	21,324	38,689	5,774	28,575	28,604	136,690
감 리 비		552	1,059	1,159	300	1,431	1,376	5,877
시설부대비		66	3	19	7	13	20	128
합 계	168	14,174	22,386	39,867	6,081	30,019	30,000	142,695

6) 향후진행계획

❍ 2015년 건립예산(459억, 채부부담 156억별도) 편성 : ’14.12월

❍ 입주시설 설치 및 운영준비 : ’15.6월 ~ ’16.2월

❍ IT Complex 준공 : ’16.2월

<첨부> 1. 서울특별시 IT COMPLEX 건립 추진계획 1부. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (정보기획담당관)	담당사무관	홍성우
	☎2133-1875	담당자	엄기문
	작 성 일 : 2014.10