투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	관내포장도로굴착복구공사(연간단가) 설계변경(3회) 시행

우리사업소에서 시행중인 『관내포장도로굴착복구공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(3회)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명  : 관내포장도로굴착복구공사(연간단가)

나. 도 급 자  : (유)다라니산업건설 대표 최형근

다. 공사기간  : 2014. 3. 26 ~ 2015. 2. 28

라. 설계변경내역(3회)

1) 공사비 : 변경사항 없음

(단위 : 원)

구 분		금 액(원)		증 ․ 감	비 고
		당 초	변 경
총공사비		3,369,284,700	3,650,000,000	증280,715,300
도급비	공급가액	1,477,531,546	1,732,727,273	증255,195,727
	부가가치세	147,753,154	173,272,727	증25,519,573
	계	1,625,284,700	1,906,000,000	증280,715,300
관급자재비		1,744,000,000	1,744,000,000	-

2) 굴착복구 시공물량 변경

(단위 : a)

구 분		계약물량(a)	변경물량(a)	증 ․ 감	비 고
소규모포장복구		110	132	증22
소 계		350	428	증78
차로복구	평삭후 덧씌우기 (20a미만기준)	155	135	감20
	평삭후 덧씌우기 (50a기준)	195	293	감98

마. 변경사유 : 포장도로 굴착복구물량 및 차로별 복구물량 증․감

바. 예산과목

1) 도시안전실, 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구지원, 시설비및부대비, 시설비(굴착기금) (증219,316천원)

2) 도시안전실, 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로유지보수, 시설비및부대비, 시설비(증42,000천원)

3) 도시안전실, 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 제설대책추진, 일반운영비, 사무관리비(증19,400천원)

붙임  1. 설계변경사유서 1부.

2. 설계변경 방침서 1부.

3. 설계변경 도서 1부.  끝

★주무관	유현선		도로보수과장	代김종범		동부도로사업소장	10/16 송상영
협조자	주무관	이민호		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-5988	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 동부도로사업소 도로보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2040-0356	/전송	2040-0307	/		/	대시민공개