문서번호	급수운영과-21309
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
박홍선	10/16 최임봉

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

현장 실정보고

(진선여고외 1개소 아리수음수대 설치공사)

2014. 10

진선여고외 1개소 아리수음수대 설치공사 현장실정보고

「진선여고외 1개소 아리수음수대 설치공사」와 관련하여 아래와 같은 사항이 있어 현장 실정보고합니다.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 진선여고외 1개소 아리수음수대 설치공사

❍ 위    치 : 강남구 역삼동 713외 1

❍ 공사개요 : D=13~50mm, L=367m

❍ 도 금 액 : 26,069,000원

❍ 도 급 사 : 경도세기냉동 대표 마남수

❍ 공사기간 : 2014.08.21.~2014.10.19

□ 보고내용

❍ 배관 구경 및 연장 변경

▶ 진선여고

- 배관(D15mm) 연장 변경(110m→80m)

- 배관(D20mm) 연장 변경( 89m→94m)

- 배관(D25mm) 연장 변경( 60m→82m)

※ 진선여고측에서 기존배관 재사용요청에 따라 15mm 배관 30m 감소

▶ 단대부고

- 배관(D15mm) 연장 변경(3m→10m)

※ 당초설계시 기존배관 위치에서 급수관 분기가 불가하여 연장추가.

❍ 진선여고는 수계전환 예정 지역으로 이에따른 부스터 펌프 설치(1개소)

▶ 현재 암사정수장 직송 → 추후 서초배수지 수계

현재 수압은 2.8kg/㎠→ 추후 1.5kg/㎠ 수압감소가 예상

▶ 동시에 사용시 수량부족으로 인해 4층에는 소출수 현상이 일부 발생하고

여름철에는 출수불량에 따른 민원이 예상됨으로 학교측에서 부스타 펌

설치 요구로 이에 따른 부스터 펌프설치 필요

□ 조치의견

❍ 상기 보고내용과 같이 변경사항에 대하여 현장여건을 고려하여 시공하고 설계변경 시행하고자 함.  끝.