투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	SH공사사장(전기통신2팀장)
(경유)
제목	교통안전시설 원인자부담공사 공사기한연장 승인(문정지구 택지 교통신호등 설치공사-신호)

1. 서울특별시 SJ공사 전기통신2팀-3294호(2014.10.15.) 및 기전과-5092호(2014.6.17)와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 시행하고 있는「문정지구 택지 교통신호등 설치공사에 따른 교통안전시설(신호)원인자부담공사」의 공사(준공)기한 연장승인요청에 대하여 아래와 같이 연장승인하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 문정지구 택지 교통신호등 설치공사에 따른 교통안전시설(신호)원인자부담공사

나. 공사장소 : 송파구 문정동 동남로 문정지구 도시개발사업단지

다. 공사내용 : 교통안전시설(신호)설치 공사

라. 승인내용 : 공사(준공)기한 연장

- 연장사유 : 토목공정 연기

- 당 초 : 승인일 ~ 2014.10.31

- 변 경 : 승인일 ~ 2015.10.13.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김동현		기전과장	10/16 김대진
협조자
시행	기전과-8078	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0362	/전송	02-2040-0365	/		/	대시민공개