문서번호	시설관리과-5252
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
성기옥		한명석	10/16 이규상
협조

대형 제수밸브 점검·정비용역

중간 보고회 개최계획

2014. 10.

상 수 도 사 업 본 부

(시설관리과)

대형밸브 점검·정비용역 중간 보고회 개최계획

우리 본부에서 추진하고 있는『대형 제수밸브 점검·정비 용역』 관련하여 “중간 보고회” 개최계획을 보고 드림.

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 대형 제수밸브 점검·정비 용역(강남지역)

※ 강서, 남부, 강남, 강동수도사업소 관내 대형밸브 점검

□ 용역기간 : 2014. 5. 16 ∼ 12. 31

□ 계 약 액 : 809백만원

□ 용 역 자 : 수자원기술(주) 외 1개사

□ 과업목적

- 대형 제수밸브에 대한 점검정비를 실시하여 상수도 시설의 신뢰도 및 가동률을 향상시키고 돌발사고를 예방하며,

- 점검정비 시 도출된 문제점에 대해 분석의견을 제시하고 향후 유지관리 자료로 활용코자 함

□ 주요 사업내용

- 이상진동 및 이상음 발생여부, 각부 누수여부 및 조임상태, 본체 균열 및 손상유무, 기어마모 및 조립상태 이상유무

- 윤활유(그리스) 주입, 개도계 정상작동 여부, 부식 및 도장상태, 밸브 개·폐(5%) 점검 등

누수 및 조임상태 점검	기아박스내 윤활유(그리스) 주입	밸브 세척

□ 그간 추진현황

□ ’14. 5. 27	착수보고회 개최(상수도본부)
□ ‘14. 5. 29	장비점검 및 밀폐공간 맨홀작업 안전교육(오금배수지)
□ ‘14. 6. 11	밀폐공간 맨홀작업 안전교육(강남수도사업소 강당)
	한국산업안전보건공단 전문강사 초빙(김갑수)
□ ‘14. 6. 13	점검 정비 직무교육(상수도본부)
	수도용 밸브의 특성, 작동원리, 유지관리 등
□ ‘14. 6. 24	밸브 점검·정비 사업설명회(강동수도)
□ ‘14. 7. 1	밸브 점검·정비 사업설명회(남부수도)
□ ‘14. 7. 31	밸브 점검·정비 사업설명회(강남수도)
□ ‘14. 9. 24	밸브 점검·정비 사업설명회(강서수도)

‘14. 5.16 ∼ 10. 14 까지,  단위 : 개소

점검정비 추진현황

사업소	총 계			밸브 및 밸브실 점검		밸브 및 밸브실 점검정비
	공정율(%)	계획	완료	계획	완료	계획	완료
계	80 %	1,903	1,524	1,087	897	816	627
강서	86 %	325	281	148	136	177	145
남부	101 %	509	514	310	323	199	191
강남	20 %	406	83	296	63	110	20
강동	97 %	663	546	333	375	330	271

*점검은 밸브실 내부 육안점검 위주, 점검·정비는 기어박스 분해, 윤활유 주입 등

□ 보고회 개최(안)

□ 일    시 : ‘14. 10. 21(화)  10:30

□ 장    소 : 본부 4층 회의실

□ 보 고 자 : 사업책임기술자 김진원(수자원기술 기술연구원장)

□ 참 석 자 : 총 17명

- 본  부 : 시설안전부장, 배수과장, 누수방지과장, 시설관리과장

- 사업소 : 강서, 남부, 강남, 강동수도사업소(급수운영과장, 시설관리과장)

- 용역사 : 수자원기술 부사장 윤석우 등 3명

이준엔지니어링 부사장 유연환 등 2명

□ 보고내용 : 사업추진 현황, 문제점 및 점검결과 분석 등

진 행 순 서

시 간	내 용	진 행	비고
10:30 ∼ 10:32	개회사	업무담당자
10:32 ∼ 10:35	부장님 인사말씀	업무담당자
10:35 ~ 10:50	과업 수행계획 보고	사업책임기술자
10:50 ~ 11:15	질의응답 및 발전방안 토론	업무담당자
10:15 ~ 11:20	부장님 당부말씀	업무담당자

□ 행정사항

□ “보고회 참석 대상자” 참석요청 통보.  끝.