함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	설계변경에 따른 계약의뢰(압구정중학교외 3개소 아리수음수대 설치공사)

우리사업소에서 시행중인 『압구정중학교외 3개소 아리수음수대 설치공사』에 대하여 설계변경 심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명  : 압구정중학교외 3개소 아리수음수대 설치공사

나. 공사개요 : 당초 D=15~20mm, L=223m

변경 D=15mm, L=299m

다. 계약상대자 : ***************

라. 계약  기간  : 2014. 8. 20 ~ 2014. 10. 18

마. 예산  과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,지원사업성시설비(음수대 설치사업)

바. 하자  기간 : 준공검사일로부터 2년

사. 변경  금액                                                 단위:원

구분	당초	변경	증․감	비고
합 계	**********	*********	************
공급가액	**********	*********	*************
부가가치세	*********	*******	**********

붙 임 : 1) 설계변경 시행, 심의결과서 각 1부.

2) 설계변경 내역서, 제비율검증, 합의서 각 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	차승현		급수운영과장	10/16 최임봉
협조자
시행	급수운영과-21367	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4846	/전송	02-3146-4889	/	201107260@seoul.go.kr	/	부분공개(7)