투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청(서남권 돔야구장 주변 보행자 전용도로 설치 전기공사)

우리 본부에서 시행하고 있는 『서남권 돔야구장 주변 보행자 전용도로 설치 전기공사』 준공기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서남권 돔야구장 주변 보행자 전용도로 설치 전기공사

나. 계 약 자 : 유신전기건설㈜ 대표 김학성

다. 계약금액 : 금1,042,178,720원

라. 준공기한 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2013.05.31 ~ 2014.10.25	2013.05.31 ~ 2015.02.28

마. 연기사유 : 선행공정(토목) 지연에 따른 후속공정 연기

바. 계약금액 : 변동없음

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 준공기한 연기 검토보고서 및 합의서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	변인수		환경설비과장	이달영		설비부장	10/16 박기형
협조자
시행	설비부-11419	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8628	/전송	02-3708-8659	/	bon0818@seoul.go.kr	/	대시민공개