다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공항버스정류소 신설(추가정차) 지점 운행개시일 연기

1. 중구 교통행정과-40412호(2014.09.15.)와 버스정책과-18987호(2014.10.08.)와 관련입니다.

2. 공항버스를 이용하는 관광객의 이용편의 증진을 위해 아래와 같이 정류소 신설(추가정차) 승인(통보)하여 운행토록 하였으나, 안내방송녹음 및 노선도제작에 다소 시일이 소요되어 ㈜공항리무진으로부터 운행개시일 연기요청이 있어 알려드리니 관련부서 및 운수회사는 시민이용에 차질없도록 소관업무 이행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공항버스정류소 신설(추가정차) 승인 내역

정류소ID	정류소 명칭	위치	정차노선	신설(추가정차) 사유
02-164	중구청앞,덕수중학교	위치도 참조	6015	관광호텔 신축으로 관광객 편의 증진
02-109	한국경제신문사		6015	주변 공항버스정류소간 거리가 멀어 관광객 편의 증진

나. 운행게시일 : 당초 - 2014.10.20.(월)첫차부터

변경 - 2014.11.03.(월)첫차부터

다. 연기사유 : 안내방송 녹음 및 노선도 제작 지연

라. 관련기관 소관사항

- 교통정보센터 : BMS, TOPIS 홈페이지 정류소 DB변경 등

- 중구 교통행정과 : 정류소 DB관리 및 추가정차 위치 확인, 정류소 신설 시민홍보, 정류소 환경조성

- 공항버스협회 및 운수회사 : 표지판, 노선도, 안내방송정비 및 교통카드 정류소 DB변경, 정류소 신설 안내문 게첨, 운전자 교육, 운행게시 증빙자료 제출 등

- 한국스마트카드 : 변경사항 반영 프로그램 생성 후 차량단말기 입력 등

붙임 :	1. 버스정류장 신설(추가정차) 위치 2부.

2. 정차순서리스트 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	시민봉사담당관,교통정보센터장,교통운영과장,서울특별시중구청장(교통행정과장),서울공항버스운송사업자협의회,한국스마트카드(주),(주)창강온앤오프
주무관	김영일		가로변정류소개선팀장	김송		버스정책과장	10/16 신종우
협조자
시행	버스정책과-19504	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사1동 7층	/
전화	2133-2296	/전송	2133-1049	/		/	대시민공개