투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 승인 및 시공관리 철저)

1. 실정보고(약수제14-203 외6건)와 관련입니다

2.지 시 내 용

1). 위 호와 관련 하여 보고한 실정보고에 대하여 따로붙임과 같이 승인하니 설계변경 등 향후 일정에 차질이 없도록 조치하여 주시기 바람.

2). 고가차도 철거후 새로이 설치한 보도블럭 및 점자,유도블럭 시공상태가 우리시 보도블럭 시공지침에 맞지 않게 시공되어 있으니 시공상태를 전면 재조사하여 설치기준에 적합하게 시공할수 있도록 조치

또한 점자 및 유도블럭은 시공후 요철부분이 파손되고 제품에는 KS마크가 없다는 민원이 있어 통보하니 현장에 시공되어 있는 제품에 대하여 전수조사하여 파손된 부분은 재시공하고, KS제품이 아니면 전면 철거후 KS제품으로 교체시공 될수 있도록 조치하고 그 결과를 실정 보고 바람

3). 차선분리대 및 미끄럼방지시설에 대한 실정보고 내용을 검토한바, 현장여건상 설치가 불가능 하고 일부 구간은 설치후 기능이 저하될수 있으니 현장 여건을 감안한 방안으로 시공될수 있도록 조치바람.

주무관							김성권			토목총괄과장					10/16 김영수
협조자
시행			토목부-20074									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사2동 3층(도시기반시설본부 토목부)															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2547						/전송			02-3708-2599					/	sssggk@seoul.go.kr												/	대시민공개