문서번호	기전과-9596
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	북부도로사업소장
강운규	정윤식	10/16 代이석재

「2014년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사(연간단가)」

설계변경보고(제2차)

2014. 10

북부도로사업소

기전과

「2014년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사(연간단가)」

설계변경보고(제2차)

우리사업소에서 시행중인 『2014년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사(연간단가)』에 대해 감리사로부터 설계변경(제2차)보고 접수되어 이를 검토하고 보고함.

□ 관련 근거

○ 2014. 10. 15. 2014년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사(연간단가)

-제2차설계변경 제출건

- 문서번호 건영 본 2014-124호(2014.10.15) (주)건영이앤씨

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2014년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사(연간단가)

○ 시 공 사 : **************

○ 공사기간 : 2014. 4. 7 ~ 2015. 2. 28

○ 공사금액 : 금78,145,970원

□ 설계변경 내용

○설계변경 사유

- 연간단가 공사의 특성상 추정물량을 산정하여 공사를 추진함에 따라 당초설계물량과 실작업물량과의 차이로 인한 물량변동 발생

- 교통안전표지 물량변동(증:180)

○설계변경 금액

(단위:원)

구 분	변경 전	변경 후	증 감		비 고
총 공 사 비	78,145,970	90,000,000	11,854,030	증
공 급 가 액	71,041,791	81,818,182	10,776,391	증
부가가치세	7,104,179	8,181,818	1,077,639	증

□ 검토의견 및 조치계획

○ 위와 같이 접수된 감리사의 설계변경(제2차)에 대해 검토한 결과 적합하여 승인 처리코자 합니다.

붙임 : 1 감리사 설계변경 요청 공문 1부.

2 변경내역서 1부. 끝.