문서번호	설비부-11404
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
변인수		이달영	10/16 박기형
협조

준공기한 연기 검토 보고

(서남권 돔야구장 보행자 전용도로 설치 및 고척교 확장 전기공사)

2014.  10.

도시기반시설본부

(설  비  부)

준공기한 연기 검토 보고

(서남권 돔야구장 보행자 전용도로 설치 및 고척교 확장 전기공사)

서남권 돔야구장 보행자 전용도로 설치 및 고척교 확장 전기공사 관련, 선행공종(토목) 지연에 따른 전기공사 준공기한 연기에 대한 검토 보고임.

관련 공문

□ 전기공사 공사기간 연기 요청[서남권(감) 2014-230호(2014.10.13.)]

실정보고 내용

□ 준공기한 변경내용

구 분	계약자	준공기한		계약금액 (변경없음)	비 고
		당 초	변 경
서남권 돔야구장 주변 보행자 전용도로 설치 전기공사	유신전기건설(주)	2013.05.31 ~ 2014.10.25	2013.05.31 ~ 2015.02.28	1,042,178,720원
고척교 확장 전기공사	건민전기(주)	2013.05.31 ~ 2014.10.25	2013.05.31 ~ 2015.02.28	373,274,320원

□ 연기사유

- 하천점용허가, 도로점용허가 등 인허가 사항 및 현장 시공여건 변경에 따른 선행공정(토목) 지연으로 후속공정(전기) 미착수

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과(시공사 귀책사유 없음)

조치의견

□ 선행(토목)공정 진행상황에 맞추어 전기공사 준공기한을 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.  끝.