문서번호	생태공원과-2368
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
임이환		최병언	전결 10/16 차광재
협조

『양화한강공원 친수공간 조성전기공사(1차)』

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

공  원  부

(생태공원과)

『양화한강공원 친수공간 조성전기공사(1차)』

준공기한 연기 검토 보고

양화한강공원 친수공간 조성 전기공사 현장 여건변화에 따른 준공기한 연기에 대한 검토 보고임.

※ 생태공원과-2200(‘14.9.25)『토목1차 준공기한 연기에 대한 검토보고』

Ⅰ		토목공사 개요

공 사 명 : 양화한강공원 친수공간 조성공사(1차)

조성면적 : 28,000㎡

공사기간 : 2013.12.27 ~ 2014.10.26

도 급 액 : 2,575,760,000원

시 공 사 : 태흥개발(주) 신현종, 정나라건설(주) 이완규

감 독 청 : 서울시시설관리공단 조경공사관리처

Ⅱ		전기공사 개요

공 사 명 : 양화한강공원 친수공간 조성 전기공사(1차)

사업개요 : 조명등주 27본, 물놀이 정수시설 등 전력수전 1식

공사기간 : 2013.12.31 ~ 2014.10.30

도 급 액 : 127,371,523원

시 공 사 : ㈜금산트리피아  김백순

감 독 청 : 서울시시설관리공단

Ⅲ		준공기한 연기

준공기한 연기(1차)

구 분	당 초	변 경	비 고
토목공사기간	2013.12.27~2014.10.26	2013.12.27~2014.12.26	기시행
전기공사기간	2013.12.30~2014.10.30	2013.12.30~2014.12.30

연기사유

○ 주공정인 토목공사 준공기한 연기에 따른 후속공정 전기공사는 기간연장이 불가피 함.

귀책소재 및 지체상금 부과여부

○ 귀책소재 : 한강사업본부

○ 지체상금 : 미부과

Ⅳ		조치 의견

위와 같이 준공기한 연기하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 1. 토목 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 시공업체 문서 1부.

4. 예정공정표 1부. 끝.