문서번호	고도정수반-5173
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	고도정수반장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
이재학	남정열	이규상		10/17 정득모
협 조
	생산부장		代노영석
	기전설비과장		서대훈
	정수과장		이태일
	정수시설과장		박심근

『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』

예비준공검사 실시결과 보고

2014.10.15.

시설안전부

(고도정수반)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』

예비준공검사 실시결과보고

『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』와 관련하여 공사품질을 확보하고 준공에 대비코자 건설기술진흥법 시행령 제56조(발주청의 업무범위)①항5호에 의거 예비 준공검사를 실시하고 아래와 같이 결과를 보고함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 공사기간 : 2009.11.23 ~ 2014.12.20

○ 도 급 비 : 50,912백만원(총차분 178,372백만원)

○ 공사개요 : 재건설 25만톤/일, 고도정수처리 45만톤/일, 관리본관 신축등

○ 공 정 율 : 약 97%

○ 시 공 사 : ㈜대우건설 대표 박영식외 2개사

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술공사 대표 이강록

□ 예비 준공검사 시행

○ 일    시 : 2014. 10. 14(화)  10:00 ~17:00

○ 장    소 : 구의정수센터 고도정수처리시설 현장

○ 점검방법 : 분야별 합동점검(토목, 기계, 전기 등)

○ 점 검 자 : 16명(외부위원 5명, 기술지원사업관리자 7명, 분야별 주무관 4명)

- 외부전문가

연번	분 야 별	소 속	직 책	성 명	비 고
1	상,하수도	㈜서용엔지니어링	부회장	손창섭
2	토목시공	㈜경동Eng	전무	김철기
3	건축	㈜크로스구조연구소	소장	김정선
4	기계	삼진유체기계	대표	이정석
5	전기	㈜비츠로택	감사	한상열

- 기술지원사업관리자 : 한국종합기술공사 상무 이상철(상수도)외 6명

- 분야별 주무관 : 시설안전부 고도정수반 송병욱외 3명

○ 입 회 자 : 11명(유지관리부서, 공사관리관)

- 구의정수센터 분야별(토목 : 김달회, 기계 : 이정원, 전기 : 이무규, 화공 : 정회중)

- 본부 구의정수센터 담당 : 권창범

- 책임건설사업관리자 및 현장대리인

- 분야별 공사관리관(토목,건축,기계,전기)

○ 예비준공 전경

공사전반에 대한 사업추진 현황 설명	활성탄흡착지내 현장점검

□ 점검결과 지적사항 및 권장사항

○ 외부전문가

- 정수지 구조물 신축조인트 부분 이물질 제거 및 보완조치외 33건

○ 기술지원사업관리자

- 정수지 관랑실계단부 논스립 일부 이탈 보수요망 외 9건

○ 구의정수센터 분야별 담당자

- 본관 관리동의 샤워실에 세탁기 설치를 위한 수전 및 배수구 설치 필요외 27건

○ 본부 분야별 담당자

- 활성탄흡착지 테라조타일 얼룩제거 요망 외 11건

※ (단, 센터 입회자 의견은 과업범위내 수용하고 과업범위외는 사안별 수용 예정임)

□ 조치계획

○ 예비준공검사 결과를 책임사업관리자에게 통보하여 보완 및 시정조치

○ 지적사항 등에 대한 조치결과를 준공검사원 제출전 책임사업자가 확인 후 준공검사원 제출토록 지시

□ 향후계획

○ 2014.10~12월 : 점검결과에 따른 후속조치 완료

○ 2014.12월 : 공사준공

○ 2015.01월 : 시설물 인계(상수도사업본부→구의정수센터)

붙임 : 1. 예비 준공검사 참석자 조서 1부.

2. 점검결과 지적 및 권장사항 세부내역 1부.

3. 점검자 및 입회자 의견서 사본 각 1부. 끝.