투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	용역계약기간 변경의뢰(구로 50+캠퍼스 건립공사 설계용역)

우리본부에서 시행중인 『구로 50+ 캠퍼스 건립공사 설계용역』의 용역기간 변경 계약을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역건명 : 구로 50+ 캠퍼스 건립공사 설계용역

나. 용 역 비 : 499,590천원

다. 계 약 자 : ㈜디엔비건축사사무소 (대표자 조도연)

라. 용역기간 : 2013. 12. 26 ~ 2014. 10 .20

마. 변경내용(용역명 및 용역기간)

구 분	당 초	변 경	비 고
용 역 명	구로 50+캠퍼스 건립공사 설계용역	서남권 50+캠퍼스 건립공사 설계용역
용역기간	‘13.12.26~’14.10.20	‘13.12.26~’15.02.13	(증)116일
용 역 비	499,590,000원	499,590,000원	-

바. 변경사유 : 기본설계(안) 변경(수영장 설치) 추진에 따른 추가과업기간 필요

사. 연기사유 귀책소재 및 지체상금 부과 여부

- 연기사유 귀책소재 : 도시기반시설본부

- 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1) 용역기간 변경검토 보고서 1부

2) 준공기한 조정요청 공문 및 공정표(변경전▪후) 각1부.

3) 준공기한 연기의뢰서 각1부.  끝.

	건축부장
★주무관	이형재		복지시설과장	조영수		건축부장	10/17 김우성
협조자	경리과장	허금도
시행	건축부-12452	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15, 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2651	/전송	02-3708-2659	/	hjlee0815@seoul.go.kr	/	대시민공개