투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	엠투케이건설 대표이사
(경유)
제목	작업기간 연기통보(제3차)

1. 귀 사의 무궁한 발전과 건승을 기원합니다.

2. 2014년 자동차전용도로 일상유지보수공사(연간단가) 작업지시(제4차)에 대한 작업기간을 아래와 같이 연기함을 통보하오니 공사추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기사유

- 관급자재(표지병) 조달청 쇼핑몰 등록 지연에 따른 작업기간 연기

나. 작업기간 변경(제4차)

당초 : 2014.9.23 ~ 2014.10.17

변경 : 2014.9.23 ~ 2014.10.31

끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	배상현		교량보수과장	10/17 김환겸
협조자
시행	교량보수과-3974	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 대치동 2번지	/
전화	02-2040-0384	/전송	02-2040-0308	/	yamato78@seoul.go.kr	/	대시민공개