문서번호	시설과-6094
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
이승언		김인규	10/17 이규상
협 조

『강북정수장 고도정수처리시설공사』

계약금액조정 심사 소위원회 결과 보고

2014. 10.

시설안전부

(시설과)

『강북정수장 고도정수처리시설공사』

계약금액조정 심사 소위원회 결과 보고

『강북정수장 고도정수처리시설공사』 건축 잔여공사 마감변경 등에 따라 계약금액 변경이 있어 계약금액 조정심의 소위원회를 개최하고, 그 결과를 다음과 같이 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 강북정수장 고도정수처리시설공사

○ 공사기간 : 2010.02.18 ~ 2014.10.31

○ 도 급 비 : 55,898,120천원

○ 공사개요 : 고도정수처리시설 72만㎥/일

왕숙천 자전거 교량 B=6.0m, L=100m

○ 시 공 사 : ㈜국제건설 대표 정광명 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜도화종합기술 대표 노진명 외 2개사

소위원회 개최

○ 일    시 : 2014. 10. 16(목)

○ 심의안건 : 건축 잔여공사 마감변경에 따른 계약금액 조정

(증) 4,790천원

○ 검 토 자 : 시설과장 5급 김인규 외 4명

계약금액 조정 근거

○ 『지방자치단체공사계약일반조건』 제6절 공사 설계의 변경 1. 설계변경 가. 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다. 1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에 의거 설계변경 및 계약금액 조정 요청

계약금액 조정 내용

○ 공사비 증감내용(감)

(단위 : 천원)

구 분	단위	요 청 내 역					검 토 내 용
		당 초		변 경		증감	수량	금액	증ㆍ감
		수량	금액	수량	금액
직접공사비	식	1	19,707	1	23,354	증)3,647	1	23,237	감)117
제경비	식	1	4,432	1	5,255	증) 822	1	5,222	감)33
부가가치세			2,414		2,861	증) 447		2,846	감)15
관급자재비			141		14	감) 126		14	-
총 공사비			26,695		31,485	증)4,790		31,320	감)165

세부 검토내용

***H형강 자재비를 메이커에서 대량수요자에 공급하는 것으로 조정

자재비: 1,130,000원 → 1,100,000원으로 조정

***구조용강관 자재비를 메이커에서 대량수요자에 공급하는 것으로 조정

자재비: 30,930원 → 29,743원으로 조정

○ 물량 및 품 계산 적정 반영

○ 실적 및 신규단가 협의율 적정 반영(협의율 : 87.111%)

계약금액 조정 검토결과

○ 『지방자치단체공사계약일반조건』 제6절 공사 설계의 변경 1. 설계변경 가. 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다. 1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 Ⅶ. 설계변경에 의한 계약금액 조정에 의거하여 설계변경 조치 및 계약금액 조정이 타당함.

2014년 10월 17일

위 검토자 : 건설공사 계약금액조정 소위원회

팀  장	: 시설과장   지방시설사무관    김 인 규

팀  원 :	고도정수반     지방시설주사    심 찬 석

고도정수반     지방시설주사    이 재 학

시 설 과   지방시설주사보    최 이 영

시 설 과   지방시설주사보    문 현 수

붙 임 : 계약금액조정 내역서 1부. 끝.