의원 요구 자료 제출

시 행	도로계획과-13515
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		도로정책팀장	도로계획과장	시설안전정책관	도시안전실장	결재
김연홍		이승석	형태경	한제현	10/17 조성일
협 조
	도로시설계획팀장				한정수
	광역도로계획팀장				방영복
	간선도로계획팀장				김기용
	민자사업팀장				정회원

제 목	의원 요구자료 제출 (요구번호 1517번, 박성호국회의원, 국토교통위원회)

□ 박성호의원 요구자료를 붙임과 같이 제출하고자 합니다.

따로붙임 : 박성호국회의원 요구자료 1부.  끝.

박성호 의원(국토교통위원회, 새누리당)

요구번호 : 1517번

9. 최근 5년간(2009~2014.9) 도로 신설 현황

- 현재 진행중인 사항까지 포함하여 답변바람

- 연도별, 도로종류별(국도, 국지도, 지방도 등) 구분기재

- 공사기간(최초공기 및 수정된 공기 모두 기재바람), 총사업비, 현재까지 소요된 예산 등 사업개요

□  의원님께서 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

2009년 이후 신설 및 진행 중인 서울시 도로 건설사업 현황

(단위: 백만원)

연번	도로유형	사 업 명	사업개요	사업기간		사업비
				당초	변경	총 사업비	2014년까지 투자액
1	특별시도	일원동 474번지 도로개설	◦위 치 : 강남구 일원동 85-1 ~ 474-1 ◦규 모 : 폭 30m, 연장 275m ◦공정율 : 2010년 준공	2008~ 2009.12	2008~ 2010.8	9,878	9,878
2	특별시도	경인로～구로1동간 도로개설	◦위 치 : 구로구 구로동 경인로 (롯데마트 앞) ~ 구로1동 우성아파트앞 ◦규 모 : B=10~20m, 연장 311m ◦공정율 : 2010년 준공	2007.10 ~ 2009.12	2007.10 ~ 2010.12	13,922	13,922
3	특별시도	구로1교 주변 도로구조 개선	◦위 치 : 구로2교∼구로1교∼디지털단지역간 ◦규 모 : 교량설치(2개소) 폭 36m, 연장 36.7∼37.5m ◦공정율 : 2010년 준공	2008.12 ~ 2010.12	2008.12 ~ 2010.12	4,800	4,800
4	특별시도	두무개길 교차로 구조개선	◦위 치 : 두무개길 한남교차로, 금호교차로 ◦규 모 : 교차로 구조개선 1개소, 한강접근로 ◦공정률 : 2011년 준공	2008.12 ~ 2011.12	2008.12 ~ 2011.12	25,600	25,600
5	특별시도	구로역~ 남부순환로간 도로개설	◦위 치 : 구로동 584-12~가리봉동 2-137 ◦규 모 : 폭20m,연장650m ◦공정율 : 2012년 준공	2009.2 ~ 2010.12	2009.2 ~ 2012.4	42,000	42,000
6	특별시도	남부순환로 ~ 부천시계간 도로개설	◦위 치 : 개봉동 307-6 ~ 구로구 항동 산50-3 ◦규 모 : 폭 23~30m, 연장 3,974m ◦공정율 : 2012년 준공	2005. ~ 2011.	2005. ~ 2012.	200,484	200,484
7	특별시도	위례성길 ~ 성내천복개 도로간 도로개설	◦위 치 : 송파구 오금동 104 ~ 마천동 5번지 ◦규 모 : 폭 30~35m, 연장 1,360m ◦공정율 : 2012년 준공	2004. ~ 2011.	2004. ~ 2012.	84,111	84,111
8	특별시도	천호동 55~217간 도로개설	◦위 치 : 강동구 천호동 55-28~217-9 ◦규 모 : 도로개설 폭 4차로, 연장 580m ◦공정율 : 2012년 준공	2006. ~ 2011.	2006. ~ 2012.	56,382	56,382
9	특별시도	성동교 확장 및 연결도로개설	◦위 치 : 성동구 행당동 행당중 앞 ◦규 모 : 성동교 확장 1차로 L=200m ◦공정률 : 2013년 준공	2012.08 ~ 2013.05	2012.08 ~ 2013.05	2,236	2,236
10	특별시도	마장지하차도 도로구조개선	◦위 치 : 성동구 마장동 498번지 ◦규 모 : 경원선 재설치 (폭 11.8m, 연장 35m) 지하차도 재설치 (폭 8.5→15.2m, 연장135m) ◦공정률 : 2013년 준공	2009.04 ~ 2013.12	2009.04 ~ 2013.12	15,800	15,800
11	특별시도	용마터널	◦위 치 : 중랑구 면목동 ~ 구리시 아천동 ◦규 모 : 4차로, 연장 3.57km ◦공정률 : 97%	2009. ~ ’14.11.21	2009. ~ ’14.11.21	178,600 (시 비포함 : 61,400)	178,600 (시 비포함 : 61,400)
12	특별시도	감일~초이간 광역도로 개설	◦위 치 : 강동구 상일동(천호대로) ~하남시 감일동 ◦ 규 모 : 6차로,총 연장 5.63㎞ (서울시 0.14㎞) ◦공정율 : 97%	2004. ~ 2014.	2004. ~ 2015.	14,749	10,000
13	특별시도	사가정길~암사동간 도로개설 (암사대교 건설)	◦위 치 : 강동구 암사동~구리시 아천동 ◦규 모 : 폭 4~6차로,연장 2.74km - 교량 1.13km, 연결도로 1.61km ◦ 공정율 : 94%	2001. ~ 2014.	2001. ~ 2015.	432,159	373,882
14	특별시도	덕송~상계간 광역도로 개설	◦위 치 : 노원구 상계동~별내동 ◦규 모 : 도로개설 폭 4차로, 총 연장 2.38km (서울시 0.84km) ◦공정율 : 65%	2011. ~ 2014.	2011. ~ 2015.	23,882	23,882
15	특별시도	방화대교 남단 접속 도로건설	◦위 치 : 강서구 방화동 방화대로 ~ 방화대교남단 올림픽대로 ◦규 모 : 폭 1~ 3차로, 연장 3.53km ◦공정율 : 84%	2005 ~ 2011.12	2005 ~ 2015.10	109,800	101,646
16	특별시도	남부순환로~오정대로삼거리간 도로개설	◦위 치 : 강서구 방화로 ~ 부천시 오정대로 삼거리 ◦규 모 : 폭 8차로, 연장 1.23km ◦공정율 : 44%	2010. ~ 2013.12	2010. ~ 2015.12	82,700	61,058
17	특별시도	남부순환로 개봉역주변 구조개선	◦ 위 치 : 구로구 개봉동 198-1번지 일원 ◦ 규 모 : 구조개선 폭 30m,연장1,160m (지하차도 4차로, 736m포함) ◦ 공정율 : 97%	2007.~ 2013.12	2007. ~ 2015.12	66,794	61,960
18	특별시도	용비교 ~ 행당중간 도로개설	◦위 치 : 성동구 금호동 용비교서측 ~행당동 행당중 ◦규 모 : 도로개설 및 확장 5~6차로, 연장2,332m ◦공정률 : 80%	2008.03 ~ 2015.12	2010.10 ~ 2015.12	33,504	27,298
19	특별시도	강남순환도시고속도로 건설	◦위 치 : 금천구 독산동(소하JCT) ~ 강남구 일원동(수서IC) ◦규 모 : 폭 6~8차로, 연장 22.9㎞ (민자사업구간 12.4km) ◦공정율 : 56%	2007. ~ 2014.5	2007. ~ 2016.5	1,551,445 (민자 별도 : 5,371억원)	1,210,187
20	특별시도	신사사거리 ~고양시계간 도로개설	◦위 치 : 은평구 신사동~고양시 향동동 ◦규 모 : 도로개설 폭 4차로, 연장 1,077m (터널구간 366m 포함) ◦공정률 : 54%	2005.04 ~ 2015.12	2005.04 ~ 2016.12	44,754 (국비50%)	42,616
21	특별시도	겸재교 건설 및 연결도로 확장	◦ 위 치 : 중랑구 면목동(동2로) ~ 동대문구 휘경동(한천로) ◦ 규 모 - 교량신설 폭 4차로, 연장 395m - 도로확장 폭 4→6차로, 연장 750m ◦ 공정율 : 70%	2008. ~ 2014.	2008. ~ 2016.	84,493	74,243
22	특별시도	신림 ~ 봉천 터널 건설	◦위 치 : 관악구 신림동(시흥IC) ~봉천7동(낙성대) ◦규 모 : 도로개설 (터널) 폭 4차로 연장 5.58km ◦공정율 : 11%	2010 ~ 2017.12	2010 ~ 2018이후	550,700	110,932
23	특별시도	월드컵대교 건설	◦위 치 : 마포구 상암동~영등포구 양평동 ◦규 모 : 교량건설 폭 6차로, 연장1.98km ◦공정률 : 20%	2010.03 ~ 2015.08	2010.03 ~ 2020.12	258,858	61,720

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로계획과)	담당사무관	이승석
	☎ 2133-8063	주무관	김연홍
	작 성 일 : 2014.10

이곳에 본문을 입력하세요