함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(계측제어설비 제작구매설치-전체, 3차분)

1. 우리 본부에서 시행중인 『암사정수장 계측제어설비 제작구매설치』와 관련 기 실정보고 승인사항에 따른 설계변경을 아래와 같이 시행코저 합니다.

가. 사 업 명 : 암사정수장 계측제어설비 제작구매 설치

나. 개    요 : TOC분석기,잔료염소분석기, 탁도계등

다. 사업현황

구 분	계 약 일	납품기간	계약금액	비 고
전 체	2010.10.14.	‘10.10.14 ~‘14.10.30	719,000,000
1차	2010.10.14.	‘10.10.14 ~ ’11.12.30	50,000,000	기준공
2차	2013.04.09	‘13.04.09 ~ ’13.12.30	546,550,000	기준공
3차	2014.04.06	‘14.04.06 ~ ’14.10.30	122,450,000	2014년

라. 예산과목 : 기계장치(암사정수장 고도처리시설공사), 시설비및부대비

마. 계 약 자 : ㈜유비와이울산병영용사촌

바. 감 리 사 : ㈜범한엔지니어링

사. 설계변경 내역(전체, 3차분)_기간변경없음.

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총 차 분	719,000,000	678,718,000	감40,282,000
1 차 분	50,000,000	50,000,000	없 음	완료(2011년)
2 차 분	546,550,000	546,550,000	없 음	완료(2013년)
장 래 분	122,450,000	82,168,000	감40,282,000

아. 변경사유 : 밸브제어방법개선으로 통신방식변경됨에 따라 외함물량삭제, 배수펌프 추가로 레벨스위치 수량증가에 따른 변경.

붙임 : 1) 내역변경 검토보고 방침서 1부.

2) 내역서 1부.

3) 변경합의서 1부.  끝.

주무관	서기종		기전설비과장	서대훈		생산부장	10/17 代노영석
협조자	주무관	이호식		주무관	오환석		주무관	代김미정
주무관	김성민		재무회계과장	代한희균
시행	기전설비과-7071	(		)	접수		(		)
우	120-030	서대문구 서대문로 94 (합동 27-1)	/
전화	02-3146-1337	/전송	02-3146-1319	/		/	대시민공개