문서번호	도로보수과-5748
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
조경현		김승태	10/20 代송재우
협조
	주무관		정규용

설계변경(제1회) 검토보고

-2014년 노후포장도로 정비공사(B구역)-

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

남부도로사업소

(도로보수과)

설계변경(제1회) 검토 보고

『2014년 노후포장도로 정비공사(B구역)』에 대하여 시공물량 증·감 및  추가예산 반영을 위한 설계변경 검토 보고입니다.

▷ 도로관리과-13756(2014.9.15)호 및 도로보수과-5527(2014.10.8.)호 관련

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2014년 노후포장도로 정비공사(B구역)

○ 공사개요

▷ 절삭후 아스팔트 덧씌우기(t=5~12.5cm) A=867a

▷ 소파복구 A=14a

○ 공사기간 : 2014. 5. 16. ~ 2015. 2. 28.

○ 총공사비 : 1,787백만원(도급비 598백만원, 관급비 1,169백만원, 이전비 20백만원)

○ 계 약 자 : 대민공영(주) 대표 성명선

Ⅱ		공사비 증 ․ 감 현황

구 분	당 초 (원)	변 경 (원)	비 고(증·감)
계	1,787,594,590	2,229,247,000	증) 441,652,410
도 급 비	598,564,590	676,130,000	증) 77,565,410
관 급 비	1,169,030,000	1,533,117,000	증) 364,087,000
이 전 비	20,000,000	20,000,000	-

Ⅲ		주요 변경 사유

○ 계획노선구간 포장물량 증․감 발생 및 노후포장 정비 추가시행

▷ 절삭후 아스팔트 덧씌우기(t=5~12.5cm)  :  867a → 1,167a (증 300a)

※ 도로관리과 재배정 예산 및 낙찰차액 활용

Ⅳ		노선별 추가 계획

○ 추가정비 계획

연번	노 선 명	구 간	규 모			비 고
			폭(m)	연장(m)	면적(a)
	계			1,360	205
1	시흥대로	KDB산업은행(시흥대로488)~디지털입구 사거리	14~19	630	97	T=5㎝
2	시흥대로	시흥IC~우리은행독산동 지점	6	660	40	T=5㎝
3	도림로	대영초교 교차로~도림고가차도	16.5	1,200	198	T=5㎝
4	시흥대로	박미삼거리~시흥유통상가	7	500	35	T=20㎝

Ⅴ		조치 의견

○  상기 보고내용과 같이 추가예산 및 낙찰차액을 반영하고 물량 증·감 내용에 대하여 설계변경 시행 하고자 함.

붙  임 : 1. 설계변경(1회)내역서

2. 노후포장도로 정비공사 추가 시행계획 1부.  끝.