문서번호	기전설비1과-3807
결재일자	2014.10.20.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비1과장	시설부장
김병훈		김남수	10/20 차광재
협 조

공사실정보고 검토보고

(한강공원 옥수나들목 신설 전기공사)

2014. 10.

한강사업본부

기전설비1과

공사실정보고 검토보고

(한강공원 옥수나들목 신설 전기공사)

우리본부에서 시행중인 「한강공원 옥수나들목 신설 전기공사」와 관련하여 감독기관이 제출한 공사실정보고서에 대하여 검토보고 드림.

관련근거

기전설비1과-1069(`14.3.21)호 : 업무지시(첨부1)

공사감독3처-715(`14.7.24)호, 9893(`14.10.17) : 공사실정보고(첨부2~5)

공사현황

공 사 명 : 한강공원 옥수나들목 신설 전기공사

공사개요

- 지하보도 조명설비   1식

- 이중육갑문 동력설비 1식

- 나들목 감시장치     1식

********************

공사기간 : 2014. 3. 14 ～ 2015. 9. 30.

**********************

검토내용

공종별 수량 및 예산 증감 내역

- 상기 공사 수행 중 옥수나들목 신설 통로BOX 공사를 위해 설치되는 임시 우회도로에  저촉되는 도로조명 이설 등

공 종	현황 및 문제점	감독부서 의견 및 대책		순공사비 증감 (천원)	적정 여부
		당초	변경
가로등 설치	○나들목 통로BOX 설치 및 교통소통대책에 따라 시공되는 뚝섬로 우회도로에 저촉되는 지장물(가로등 5본) 이설 발주처 지시	-	●임시도로와 저촉되는 기존 가로등을 철거하고 도로복구 후 기존 가로등 재설치 및 배관, 배선 복구 시행 (가로등 12본 철거 후 재설치)	증 47,025	적정
임시등 설치	○임시 우회도로 구간에 도로조명설치 필요.	-	●임시도로 선형에 맞추어 투광등을 설치 후 설계에 반영 (15등 설치)		적정
기타	○배관, 배선 등 물량	-	●실물량 정산시행.		적정
가로등복구 설치	○기전설비1과-2289호에 따라 나들목 상부의 도로 복구 시 기존에 철거했던 가로등주 대신에 신규 가로등주를 설치하여야 하나 토목공정상의 도로 복구일정 단축으로 인해 도로 복구일내에 관급자재인 신규 가로등주 수급이 불가한 실정임	-	●가로등 미설치로 인한 교통사고 예방을 위해 도로 복구구간에 기존에 철거했던 가로등6본을 임시로 설치하고 관급자재 수급시 신규 가로등주 설치	증 670	적정

가로등 관리부서 협의 : 해당구간 전선로 및 등주8본 교체(등기구 미포함)로 관급자재비(약 6,000천원) 증액(첨부6~8)

보고자 의견

감독기관에서 제출한 보고 사항을 검토한 결과, 업무 지시사항에 따른 수량증감 적정하게 반영되어 보고내용 승인 및 설계변경(증액)토록 감독기관에 통보하고자 함.

첨부 : 1. 업무지시 1부.

2. 실정보고서 4부.

3. 가로등 이설관련 문서 3부.  끝.