문서번호	설비부-11543
보존기간	년
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	시책사업과장
김홍석	10/20 이흥복

「서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 신호공사」

설계변경 소위원회 심의요청

2014. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

설계변경 소위원회 심의요청서

문서번호	설비부 -	요청부서	시책사업과	요청일	2014. 10. .
공 사 명	신촌·마포로 중앙차로 및 교통구조개선 전기공사
감리개요	공사규모	- 아현고가차도(L=939m, W=15m) 철거 - 가로등 55본, 중앙차로승강장 쉘터등 15본 설치 - 교차로 3개소, 중앙차로승강장 6개소 신호설비 설치
	공사기간	2013. 10. 01. ~ 2014. 11. 14.
	감 리 사	㈜동해종합기술공사 외 1
	설 계 사	신명건설 외 1
	시 공 사	㈜성림파워넷
심의요청 사 유	∘ 3,000만원 이상 설계변경
<설계변경 사유> - 경찰청 규제심의 결과에 따라 물량조정 - 교통운영과 디자인지주 설치지시 - 유지관리부서 요청 및 설계오류 정정
주 요 변 경 내 용
- 유지관리부서(구청) 요청으로 가로등 설치구간 및 물량 변경 - 경찰청 교통규제심의 결과에 따른 신호기 위치조정 및 물량 변경 - 교통운영과 기준에 따라 신호등주 서울우수공공디자인 지주로 변경 - 아스팔트 굴착 관리청(사업소) 복구 실정산 - 설계누락 및 오류 사항 정정
별첨서류	설계변경 심의자료 1부(별첨)

건 명 : 신촌·마포로 중앙차로 및 교통구조개선 전기공사

○ 현 황

계 약 명	신촌·마포로 중앙차로 및 교통구조개선 전기공사		시 공 자	(주)성림파워넷
공 사 규 모	- 아현고가차도(L=939m) 철거 - 가로등 55본, 쉘터등 15본 설치 - 교차로 3개소, 중앙차로승강장 6개소 신호설비 설치	계 약 금 액	868,774,500			계약일
						2013.09.26
공사기간	2013.10.01. ~ 2014.11.14.	감리자	(주)동해종합기술공사 외 1		설계자	신명건설 외 1
계약형태	기타( ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사( )				※ 작성자: 김홍석 ☎ 3708-8646

○ 설계변경 개요

가. 유지관리부서(구청) 요구로 가로등 설치구간 및 물량 변경

나.  경찰청 교통규제 심의결과에 따른 신호기 위치조정 및 물량 변경

다.  신호등주는 서울우수공공디자인(SGPD-00374)로 사양 변경

라.  아스팔트 굴착 관리청(사업소) 복구 실정산

마.  설계누락 및 오류 사항 정정

- 디자인 맨홀 및 일반 맨홀 설계 누락분 반영

- 기존 음량신호기 디자인지주 설치호환 불가로 교체 등

바. 내역 변경

변경전 : 868,774천원, 변경후 : 1,212,250천원, 증343,475천원

○ 설계변경 배경

- 경찰청 규제심의 결과에 따라 물량조정

- 교통운영과 디자인지주 설치지시

- 유지관리부서 요청 및 설계오류 정정

○ 설계변경 세부내용

구 분	내 용	선택 항목
설계변경 유형	① 설계도서 내용 불투명, 누락, 오류. 상호모순 ② 지질, 용수 등 현장조건 상이 ③ 신기술, 신공법 적용 ④ 민원수용, 보수, 보강 ⑤ 피해 건물보상 ⑥ 정책, 계획 등 변경 ⑦ 구조형식변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 운반거리변경 ⑩ 유관기관요청 ⑪ 물가변동에 따른 계약금액조정	① ⑧ ⑩
계약금액 조정 (단위 : 천원)	① 증액 : 343,475 ② 감액 : 천원 ③ 공사비 변경없음( )	①
설계변경 효과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편의증진, ⑦ 민원해소 ⑧ 설계구조보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진	② ③ ⑥ ⑨

※  해당사항 우선순위로 복수 선택 가능

○ 설계변경 경위

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정

- 감리 신촌·마포로 중앙차로 및 교통구조개선 전기공사 설계변경 실정보고

[신촌감 제2014-254호, 2014.10.10]

- 신촌·마포로 중앙차로 및 교통구조개선 전기공사 설계변경 실정보고 검토

[설비부-11539호, 2014.10.20]

○ 설계변경 승인절차

- 설비부 설계변경소위원회(계약금액 조정심의) ➞ 설계변경 ➞ 변경계약 ➞ 공사시행