다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경(용역기간 연장) 계약 요청

우리부서에서 진행하고 있는 ‘서촌 임대주택 유형개발 용역’의 계약기간을 2015. 1. 20까지 연장하여 진행코자 변경계약 의뢰합니다.

○  변경내용

- 용역기간 : 당초  2013.12.26 ~ 2014.10.21

변경  2013.12.26 ~ 2015. 1.20

※ 기타사항은 변경없음

붙임 :  1. 설계변경(용역기간 연장) 시행 방침 1부

2. 합의각서 1부 . 끝.

	건축기획과장
주무관	김훈		서촌현장팀장	양준모		한옥조성추진반장	10/20 문인식
협조자
시행	건축기획과-23270	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 3층 건축기획과	/
전화	02-2133-7267	/전송	02-2133-0750	/	myidcap@seoul.go.kr	/	대시민공개