문서번호	토목부-20270
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		代여용석	10/20 노우성
협조
	주무관		양준식

공사구간에 저촉되는 상수도 이설 검토보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

공사구간에 저촉되는 상수도 이설 검토보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

제2염곡 지하차도 공사 구간에 상수도(D=600mm)가 양재대로를 횡단하여 간섭되고 있어 관리주체인 강남수도사업소와 수차례 협의결과에 따라 주･야간 병행공사로 시행코자 하는 검토 보고임

관련근거

❍ 강남수도사업소 시설관리과-5671호(`14. 3.18.)상수도이설 재협의 회신

❍ 동기강 2014-246호(`14.10. 6.) 염곡교차로 구간 시 상수도 이설 승인 보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 1개소, 지하차도 3개소)

❍ 공 사 비 : 222,995백만원 (8차: 12,480백만원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.(8차 `14.10.1.~`15.8.31.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1

❍ 감  리  사 : ㈜동명기술공단

추진경위

❍ `13. 1.24. : 지장물(상수도) 이설 협의 (도기본→강남수도사업소)

❍ `13. 2.06. : 상수도 이설요청에 대한 회신 (강남수도사업소→도기본)

원인자부담, 부단수공법시행, 야간시행

❍ `13. 4.22. : 시상수도 이설 재협의 (도기본→강남수도사업소)

주･야간 병행 시행으로 변경요청

❍ `13. 4.24. : 상수도이설 재협의에 대한 회신 (강남수도사업소→도기본)

야간공사로 시행 (민원발생, 대형장비 진출입시 교통혼잡)

❍ `14. 3.14. : 상수도이설 재협의 (도기본→강남수도사업소)

도로확장에 따른 작업공간 확보로 주･야간 병행시행

❍ `14. 3.18. : 상수도이설 재협의에 대한 회신 (강남수도사업소→도기본)

주, 야간 병행시행

감리단 보고 내용

❍ 현 황 도

❍ 공사구간

구 간	연장(m)	작업계획	내 용	비 고
① - ②	100	야간	상업지로 보도이용자 증가에 따라 야간시행
② - ③	250	주간	차로확장 완료 구간으로 주간시행
③ - ④	40	야간	도로횡단 구간으로 교통통제로 야간시행
④ - ⑤	120	주간	차로확장 완료 구간으로 주간시행
⑤ - ⑥	242	야간	지장물 및 건물진출입로로 인해 야간시행
합 계	752

❍ 주요 공사 내용

공 종	내 용	공사비 (백만원)
토공사	･ ASP절단(주간 964m, 야간 1,412m), ･ 터파기(주간 1,050㎥, 야간 1,663㎥)	97
관로공사	･ 주철관부설(주간 375m, 야간 330m) ･ 이형관(주간 53개소, 야간 141개소)	221
구조물공사	･ 밸브실(주간 5개소, 야간 8개소)	41
부대공	･ 안전휀스설치(주 740m, 야간 764m) ･ 교통정리원(주간 16인, 야간 16인)	22
관자재비	･ 주철관(D600 115본, D300 1본, D200 2본)	380
포장공사	･ 포장복구공사(주간 713㎡, 야간 976㎡)	77
소계 (도급공사비)		838
폐기물처리	폐아스콘 437톤	6
합 계		844

❍ 공사비 증･감 비교 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변경(주･야)	변 경(야간)	비 고
직접공사비	-	684,523	718,445
간접공사비	-	153,477	161,555
도급공사비	-	838,000	880,000
폐기물처리비	-	6,300	6,300	폐기물처리용역
총공사비	-	844,300	886,300	차인 42,000

※ 출동경비 및 감독업무비등은 별도로 선납부후 착공 가능함.

조치계획

❍ 서울시 강남수도사업소 협의 결과에 따라 주･야간 병행 작업으로 제2염곡 지하차도를 우회하여 시 상수도 이설 시행코자 하며

❍ 추가되는 비용은 상수도사업본부 설계기준을 준용하여 감리단 검토의견에 따라 우리본부 설계변경 소(본부)위원회 심의를 거쳐 설계변경 시 반영토록 조치코자 함.

붙 임 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 관련공문 1부.  끝.