문서번호	시설보수과-4333
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
금종융		김찬구	10/20 代송재우
협조

아스콘포장면적 감소에 따른 아스콘물량정산

외 2건 관련 실정보고 검토

(도림천4복개:우안 외 1개소 보수공사)

2014. 10.

남부도로사업소

(시설보수과)

아스콘포장면적 감소에 따른 아스콘물량정산

외 2건 관련 실정보고 검토

[도림천4복개(우안) 외 1개소 보수공사)

『도림천4복개(우안) 외 1개소 보수공사』와 관련 공사 감독중인 시설관리공단에서 아스콘포장면적 감소에 따른 아스콘물량정산 외 2건에 대한 실정보고 검토보고 임.

■ 공사개요

○ 공 사 명 : 도림천4복개구조물(우안) 외 1개소 보수공사

○ 공사기간 : 2014.5.22 ~ 2014.11.17

○ 공사개요 : 교면포장 96a, 신축이음장치보수 155m, 표면보수 468㎡

○ 도급금액 : ￦915,644,300원

○ 시 공 사 : 연단토건(주) 대표  이 정 수

○ 감 독 청 : 서울특별시 시설관리공단 (공사감독1처 성경석)

■ 시설관리공단 실정보고 및 검토내용

【관련공문 : 시설관리공단 공사감독1처-10072호 (2014.10.14)】

< 아스콘포장 면적 감소에 따른 관급자재 물량정산 >

가. 현   황

○ 당초 설계서상 도림천4복개 및 봉천복개(당곡사거리) 아스팔트 포장은 두께 T=8cm 평삭후 덧씌우기 포장코자 하였으나 현장 실측결과 기존 아스팔트 포장 두께가 평균 T=5.5~8cm로 포장두께가 일정치 않으며

○ 도림천4복개 아스콘포장 면적에 신축이음장치 면적이 포함되어 있어 공제 필요

나. 아스팔트포장 물량 실측

구분	위 치	폭	연장	평균깊이	비 고
당초	도림천4복개 (구로디지털단지역→대림역)	13.5m	646m	8cm
	봉천천복개 (당곡사거리)	39.5m	24m	8cm
실측	도림천4복개 (구로디지털단지역→대림역)	13.5m	635.2m	6cm	두께산출 참조
	봉천천복개 (당곡사거리)	38.0m	24m	6.5cm

※ 평삭후 아스팔트 두께 실측

- 도림천4복개 평삭후 아스팔트 두께 T=5.5~7cm→평균 6cm 적용

- 봉천천복개(당곡사거리) 평삭후 아스팔트 두께 T=6~8cm→평균 6.5cm 적용

다. 물량변경(증,감) : 당초 1,840톤 → 변경 1,359톤 (감 481톤)

○ 도림천4복개 물량 증,감

- 아스콘포장 면적 : 당초 87a → 변경 85.75a (감 1.25a)

- 관급자재(아스콘) : 당초 1,668톤 → 변경 1,217톤 (감 451톤)

○ 봉천천복개(당곡사거리) 물량 증,감

- 아스콘포장 면적 : 당초 9a → 변경 9.12a (증 0.12a)

- 관급자재(아스콘) : 당초 172톤 → 변경 142톤 (감 30톤)

○ 개략공사비 : (감) 9,130천원

※ 관급비(아스콘) : (감) 36,061천원

라. 시설관리공단 검토의견

○ 기존 아스팔트 두께와 동일하게 신규 포장 두께를 기존과 같이 T=6~6.5cm로 조정 및 현장 실측결과에 따라 절삭후 ASP덧씌우기 면적 및 아스콘 물량 조정 필요

< 도림천4복개 상판보수 물량 증가 >

가. 현   황

○ 당초 설계서상 상판보수는 도림천4복개 교면방수 포장시 절삭후 열화된 콘크리트면을 초속경을 사용하여 보수하는 공종으로

○ 아스콘 절삭작업후 현장 확인결과 재료분리 등 콘크리트 열화면 증가로 인해 상판보수 물량이 증가되는 실정임

나. 상판보수 물량조사 현황

연번	위 치	보 수 면 적			비 고
		폭(m)	연장(m)	면적(㎡)
1	J11~J12(P45~P46)	0.80	2.50	2.00	현황사진#1 참조
2	J12~J13(P46~P49)	0.50	2.00	1.00	현황사진#2 참조
3	J15~J16(P57~P61)	2.50	3.00	7.50	현황사진#3 참조
4	J17~J18(P65~P69)	1.50	2.00	3.00	현황사진#4 참조
5	J17~J18(P65~P69)	2.00	1.00	2.00	현황사진#5 참조
6	J17~J18(P65~P69)	6.00	9.00	54.00	현황사진#6 참조
7	J18~J19(P69~P73)	2.10	2.60	5.46	현황사진#7 참조
합 계				74.96㎡

다. 상판보수 물량 증,감

○ 도림천4복개

- 상판보수 : 당초 50㎡ → 변경 75㎡ (증 25㎡)

- 개략공사비 : (증) 6,556천원

라. 시설관리공단 검토의견

○ 도림천4복개의 열화된 콘크리트 상판을 보수하여 구조물 안전성 확보 및 시설물 유지관리에 필요

< 차선도색 공종 반영 >

가. 현황 및 문제점

○ 당초 설계서상 차선도색 공종이 계약(도급)내역에서 누락되어 교면포장 완료후 교통흐름을 원활히 하고 차량안전사고 예방을 위한 차선도색 공종 반영이 불가피한 실정임

나. 노면표시 시방서 및 품질기준

○ 서울시 노면표시 시방서 기준

- 노면표시 재귀반사성능은 노면 건조상태에서 노면표시 도색 7일 경과후 7일이내 흰색 RL⦥240, 노란색 RL⦥150, 청색 RL⦥80으로 규정

※ 노면표시 재귀반사성능 및 두께 기준

입사각	관찰각	구 분	재귀반사성능(mcd/㎡·Lux)			두께
			백색	황색	청색
88.76°	1.05°	시 공 후	240	150	80	2mm
		6개월 경과시	120	70	40
		우천시 초기	70	40	20

- 도림천4복개 및 봉천천복개(봉천로 및 당곡사거리)는 시도구간으로 4종 융착식 노면표시용 도료 사용

· 백색 : 재귀반사성능(RL)⦥240으로 R5 사용

· 황색 : 재귀반사성능(RL)⦥150으로 R3, R4 사용

- 차선도색 품 적용 : 표준품셈 제12장 도로포장 및 유지 12-6-2 차선도색 [3. 융착식 도료 수동식(핸드가이드식 라인마커 사용)] 적용

※ 4종 융착식 노면표시용 도료 품질기준 참조

다. 구간별 차선도색 물량조사 현황

연번	구분	공종	차선도색 연장		비고
			폭(m)	연장(m)
1	도림천4복개	백색실선	0.15m	577.0m
		백색파선	0.15m	549.0m
		황색실선	0.15m	1,615.0m
		황색파선	0.15m	90.0m
		문자기호	0.15m	495.0m
		횡단보도	0.15m	486.0m
2	봉천천복개 (봉천로)	백색실선	0.15m	190.0m
		백색파선	0.15m	195.0m
		문자기호	0.15m	114.0m
		횡단보도	0.15m	115.0m
3	봉천천복개 (당곡사거리)	백색파선	0.15m	123.0m
		황색실선	0.15m	171.0m
		문자기호	0.15m	193.0m

라. 차선도색 물량 및 공사비 증,감

○ 차선도색 물량 증,감

- 백색실선 : 당초 0m → 변경 767m (증 767m)

- 백색파선 : 당초 0m → 변경 867m (증 867m)

- 황색실선 : 당초 0m → 변경 1,786m (증 1,786m)

- 황색파선 : 당초 0m → 변경 90m (증 90m)

- 문자기호 : 당초 0m → 변경 802m (증 802m)

- 횡단보도 : 당초 0m → 변경 601m (증 601m)

○ 개략공사비 : (증) 25,960천원

라. 시설관리공단 검토의견

○ 도림천4복개 및 봉천천복개(당곡사거리 및 봉천로) 누락된 차선도색 공종을 추가 반영하여 교통흐름 및 교통 안전사고를 예방 필요

■ 조치계획

○ 상기내용 관련 아스콘포장 면적감소에 따른 아스콘 물량정산 및 상판보수 물량 정산은 현장실측 결과에 의거 정산코자 하는 건이며, 차선도색 공종 추가 사항은 당초 발주시 이설비에 반영하였으나 포장정비후 도급비로 변경 반영코자 하였던 건으로 실정보고 내용이 타당함으로 시설관리공단에 품질관리, 안전관리 철저 등 감독업무에 철저를 기하여 공사 시행토록 통보 조치하고,

○ 공사비 증가분은 추후 설계변경시 공사비 잔액 및 낙찰차액 등 “도림천4복개(우안) 외 1개소 보수공사” 예산 범위내에서 공사비 반영토록 조치

첨부   시설관리공단 실정보고 관련서류 등 1부.  끝.