문서번호	급수설비과-6687
보존기간	년
결재일자	2014.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	급수설비과장	급수부장
김형준	김인환	10/21 이상홍
협 조

급수공사 감독대행 주간실적 보고

2014. 10. 21

상수도사업본부

(급수설비과)

급수공사 감독대행 주간실적 보고

상수도공사 시공감독업무 위탁과 관련하여 급수공사 감독대행 주간실적을  검토하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ. 시공감독 위탁현황

□ 위탁개요

○ 위탁대상

- 급수공사 및 인입관 철거 ․ 폐쇄(포장복구 포함) : 39,000건

- 긴급 누수복구공사(포장복구 포함)              : 49,000건

○ 위탁기간 : 2013. 5. 25 ~ 2015. 5. 24

○ 계약금액 : 9,131,891,000원

○ 도 급 자 : (주)이준엔지니어링, (주)건양엔지니어링

□ 인력현황

○ 근무인원 : 31명 (급수공사)

- 상주 : 28명(중급 8명, 초급 20명), 비상주 3명

□ 추진 실적

○ 급수공사(상주감독대행자)

- 기 간 : 2014. 10. 06 ~ 10. 12.

구 분		감독대행			현 장 입회율 (%)	부설연장 (m)	시정조치 (건)
		계	현장입회 (건)	사후확인 (건)
금 주		427	418	9	97.90	1,793	9
누계	’14.1.1이후	13,578	13,462	116	99.20	42,510	310
	’13.5.25이후	26,330	26,029	303	98.90	85,913	644

- 시정조치 : 안전 3, 자재 4건, 기타 2건.

○ 포장복구공사(상주감독대행자)

- 기 간 : 2014. 10. 06 ~ 10. 12.

구 분	계			급수공사업체 복구			포장업체 복구
	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)
금 주	229	209	91.30	73	73	100	156	136	87.2
누 계	8,631	7,711	89.30	2,537	2,519	99.30	6,094	5,192	85.20

○ 상주감독대행자 상호 업무지원

- 기 간 : 2014. 10. 06 ~ 10. 12.

구 분	계			사업소 내			사업소간
	계	급수공사	누수복구	소계	급수공사	누수복구	소계	급수공사	누수복구
금주(회)	3	3	-	2	2	-	1	1	-
누계(회)	415	290	125	360	235	125	55	55	-

○ 사업소 순회 지도감독(기술지원감독대행자)

- 기 간 : 2014. 10. 13 ~ 2014. 10. 17.

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
지도감독 (건)	급 수	16	2	2	2	2	1	2	3	2
	포장기타		-	-	-	-	-	-	-	-
시정조치(건)			-	-	-	-	-	-	-	-

※ 시정 조치 : 교통정리원 근무위치 시정

따로붙임 : 위탁감독대행 주간실적 각 1부. 끝.