문서번호	시설관리과-16459
결재일자	2014.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		강동수도사업소장
황대룡	송종범	이계환		10/21 원응연
협 조
	급수운영과장		代이경재
	기전팀장		代강순길
	주무관		최지영

2014년 하반기 배수지 항 청소 실시 계획

2014. 10.

강동수도사업소

(시설관리과)

2014년 하반기

배수지 항 청소 실시 계획

시민고객이 안심하고 마실 수 있는 맑고 깨끗한 아리수를 공급하기 위하여

2013년 하반기 배수지 항청소를 아래와 같이 실시 하고자 함.

※ 시행근거 : 수도법 제33조(위생상 조치), 수도법 시행령 제50조

환경부령 제209조(청소 및 위생관리 등에 관한 규칙 제6조)

□ 현 황

○ 용 역 명 : 2014년 길동배수지외 2개소 항청소 용역

○ 계 약 자 : 태화종합건설(주) 대표 김장원

○ 계약금액 : 83,189천원

○ 용역기간 : 2014.04.01 ~ 12.31

○ 청소대상 : 3개소

연번	배수지명	용량(㎥)	시설년도	지수	비고
1	길동배수지	60,000	2006	4
2	오금배수지	8,000	1987	2
3	거마배수지	3,000	1982	2

○ 청소방법 : 세정제 청소(연 1회 이상 세정제)

※ 길동배수지 3지는 기시행 완료(2014.9.31~10.01)

□ 배수지 별 항 청소 세부 추진계획

○ 청소 기간 : 2014.11.06 ~ 11.21

구 분	일	월	화	수	목	금	토
월/일	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8
배수지별					거마1지	거마2지
월/일	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15
배수지별			오금1지	오금2지	길동 배수지 1지
월/일	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22
배수지별			길동 배수지 2지		길동 배수지 4지
월/일	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29
배수지별

□ 배수지 정기점검 담당자 현황

과 별	시설물명	용 량(톤)	위 치	점검담당	점검예정일	비 고
급수운영과 (2개소)	오금배수지	8,000m3	오금동 51번지	지역 : 조봉구, 시설물 : 최지영, 김용현 순찰 : 장재춘, 안정현 기전 : 강순길, 박종희	11.11~11.12	2일
	거마배수지	3,000m3	하남시 감이동 산81-6	지역 : 이덕규, 시설물 : 최지영, 김용현 순찰 : 장재춘, 안정현 기전 : 강순길, 박종희	11.06~11.07	2일
시설관리과 (1개소)	길동배수지	60,000m3	둔촌동 산94번지	지역 : 태상필, 시설물 : 황대룡 순찰 : 이성석, 임언섭 기전 : 강순길, 박종희	11.13~11.21	6일

□ 행정사항

○ 배수지 항 청소일정 보고 : 본부(시설관리과)

○ 수질검사를 위한 배수지 청소일정 통보 : 행정지원과

○ 항청소 시 내부 구조물 정기점검 병행 실시 : 지역, 시설물 및 기전팀 담당 합동점검

붙 임 : 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 1부.  끝.