문서번호	토목부-20434
결재일자	2014.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	10/21 노우성
협조
	주무관		박근우

상주 보조감리원 투입

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

2014.10.

도시기반시설본부

(토목부)

상주 보조감리원 투입

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

제작시기가 도래(’14.11.)한 서빙고 고가교의 품질확보를 위하여  전문성을 가진 강교분야 상주 보조감리원을 투입하고자 함

※관련근거 : 한종(서빙고)제14-253호(2014.10.17.)

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 전면 책임감리용역

○ 용역규모

- 기존 고가철거 B=16m, L=753m

- 고가설치 B=6.4~10.4m, L=115~290m, 기존고가 보수·보강 B=16m, L=140m

○ 용역기간 : 2010.12.31. ~ 2015.02.28.(4차 ‘14.1.22~’15.2.3)

○ 용 역 비 : 1,638,300천원(4차 376,000천원)

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 대표 이강록 외 1개사

Ⅱ		관련근거

○ 건설기술진흥법 제39조(건설사업관리등이 시행)

○ 건설기술진흥법 시행령 제60조(건설사업관리기술자의 배치)

Ⅲ		보고내용

○ 현황 및 투입사유

- 전체분에 보조(강교)감리원을 배치(8개월)하는 것으로 계획되어 있으나 금회(4차분)에는 미배치하는 것으로 되어 있음

- 토목공사(4차분) 강교제작 시기가 도래함에 따라 품질확보를 위하여  강교분야의 전문성을 가진 상주보조감리원 투입이 필요함

○ 투입계획

- 전체분

투입등급	소요 개월	투입계획	감리비	비고
감리사보	총 7.0개월(당초 8개월) ․제작 및 가조립 : 3.5월 ․도색 : 1.5월 ․현장조립 : 2.0월	‘14.11. ~‘15.05.	62,600천원	실제투입일은 강판납품시점

- 금회 4차분

투입등급	소요 개월	투입계획	감리비	비고
감리사보	2.3개월 ․제작 및 가조립 : 2.0월 ․도색 : 0.3월	‘14.11. ~‘15.01.	19,420천원	실제투입일은 강판납품시점

○ 감리비 확보방안

- 금회 4차분은 용역기간을 축소하여 강교 감리원 추가 투입비용 확보

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
감리원	책임감리원1, 토목1	책임감리원1, 토목1, 강교1	강교1
용역기간	‘14.01.22.~’15.02.03.	‘14.01.22.~’15.01.14.	감0.6개월
감리비	376,000천원	376,000천원	-

- 잔여기간(‘15. 1.~’15. 5.) 투입 감리비는 2015년 예산 투입

Ⅳ		조치의견

○ 강교분야 전문성을 가진 감리원 투입이 필요하므로 금회(4차분)에 강교   분야 상주보조감리원을 투입하되

○ 강교 감리원 투입비는 4차분을 설계변경(용역기간 축소, 배치계획 변경)하여 반영하고자 함

※ 투입시기 : 강판 납품예정일(‘14.10.28.)

투입감리원 : PQ 비평가 대상으로 투입전 적정여부 검토예정

붙 임 : 감리단 강교감리투입계획 보고 1부.  끝.