문서번호	정수시설과-2291
결재일자	2014.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이상훈	안길찬	10/21 代임건혁
협 조

설계변경 심의위원회 개최결과 및 시행보고

- 2014년 토목건축 시설물 유지보수공사(연간단가) -

2014.  10.

강북아리수정수센터

정 수 시 설 과

설계변경 심의위원회 개최결과 및 시행보고

- 2014년 토목건축 시설물 유지보수공사(연간단가) -

우리정수센터에서 시행중인 『2014년 토목건축 시설물 유지보수공사(연간단가)』에 대한 설계변경 사항이 발생되어 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과에 대하여 보고합니다.

1. 심의대상

가. 공 사 명	: 2014년 토목건축 시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간	: 2014. 6. 18 ~ 11. 30

다. 도 급 비	: 50,729,600원

라. 도 급 자	: 삼농수목원(주) 최 연 철

2. 심의일시 : 2014. 10. 21. (정수시설과 사무실)

3. 설계변경 현황

가. 계약금액 변경

□ 당초 : 50,729,600원

□ 변경 : 변동 없음

가. 물량 변동 및 신공정

연번	공 종	위 치	지 시 내 역	비고
1	배수로 정비	정수센터 외곽울타리 동측	1. U측구수로관 부설 : 8m (2000×500×550) 2. PE이중관 300mm 부설 : 10m 3. 집수정 부설 : 1개소 (600×600×1000) 4. 포장(레미콘) : 8×2×t15 5. 메쉬휀스 철거,재설치 : 2×2m×2개소	신규
2	빗물받이 설치	정수센터 외곽울타리 북측	빗물받이 부설 : 3개소 (510×410×950) PE이중관 300mm 부설 : 14.7m 포장(아스콘) : 6.7×0.51×t12.5	물량변동
3	정화조 철거 및 설치	송수펌프동 화장실	1. 정화조 5인용 철거, 설치 : 1개소 2. 포장(아스콘) : 5.9×2.2×t12.5	신규
4	도로침하 정비	침전지 1-1계열 북측	터파기 : L9×W1.3×H0.5m 되메우기 : L9×W1.3×H0.5m 3. 포장(레미콘) : 9×1.3×t10 4. 포장(아스콘) : 9×1.3×t12.5	신규
5	방충망 교체	여과지동, 약품투입동, 송수펌프동	1. 방충망 교체 : 364개 (910*1450, AL)	신규
6	단면 보수	송수펌프동 남측	콘크리트 단면보수 : 14.07㎡	물량변동
7	우레탄 방수	1,2계열 약품탱크 방류벽	우레탄방수 : 515.3㎡	물량변동
8	도장	정문 수위실	수성 도장 : 39.4㎡	물량변동
9	시건장치 설치	역세밸브실, 퇴수밸브실, 정수지 유입·유출구실	시건장치 설치 : 12개소	신규
10	방진패드 설치	염소접촉조실 맨홀	1. 맨홀 뚜껑 방진패드 설치 : 8개소	신규
11	신축조인트 STS 설치	염소투입동 동측	1. 신축조인트 STS 마감 설치 : 1개소 (7.2m×0.2m)	신규
12	보도블록 정비	정문수위실	고압보도블록 침하 정비 2m×2m	신규
13	배수홈통 수리	아리수창고	배수홈통 교체 PVC 100mm×1.5m	신규

4. 심의내용 및 결과

심 의 내 용	결 정 내 용	비 고
◦설계변경의 타당성 ◦신규공종 단가 산출 적정여부 ◦계약변동(증∙감)물량 낙착률적용 적정 여부 ◦제경비 적정 산정 및 적용 적정성 ◦각종 제반규정 준수 여부	◦설계변경 타당 ◦단가 적정 ◦계약변동(증∙감)물량 낙착률 적용 적정성 타당 ◦제경비 적정산정 및 적용 적정 ◦각종 제반규정 준수 타당

5. 조치의견

○ 심의결과에 의거 변경계약 의뢰하고, 설계변경 내역과 같이 변경 시행하고자 합니다.

붙임분서 : 1. 설계변경 심의 결정서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.    끝.