투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	조이너스건설 주식회사 현장대리인
(경유)
제목	공무직 노동조합사무실 리모델링공사 변경사항 및 추가공사 통보

1. 귀 사의 발전을 기원합니다.

2. 우리시와 귀 사간 계약체결하여 공사하고 있는□공무직 노동조합사무실 리모델링공사□에 아래와 같은 추가 및 변경사항이 있어 통보하오니 공사기간이 짧은 점을 감안하여 공사에 반영하고 설계변경을 위한 내역서 작성등을 검토후 2014. 10. 24까지 통보하여 주시기 바랍니다.

구분	요청내용
추가사항	- 가설건축물 컨테이너 2개동
	책상, 의장 등 사무용품 폐기물 처리
	- 1, 2층 내부벽체(석고벽 및 단열재) 교체
	2층 대회의실 단상 확장(65cm)
	1, 2층, 옥상에서 급수설비 가능하도록 공사
	준공청소
계획변경	- 1층 LOW칸막이 삭제
	1층 복도 계획 변경
	2층 접이식칸막이 삭제

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김희태		건축관리과장	곽동호		건축부장	10/21 김우성
협조자
시행	건축부-12547	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 2동 2층 (서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	대시민공개