문서번호	교통정보센터-15424
결재일자	2014.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로정보팀장	교통정보센터장
차명호		최종선	10/22 이경순
협조

「도로기반시설 설치관련 교통관리시스템 구축방안」마련

‘14년 4/4분기 소통회의 개최결과 보고

2014. 10. 21(화)

교통정보센터

(도로정보팀)

「도로기반시설 설치관련 교통관리시스템 구축방안」마련

´14년 4/4분기 소통회의 개최결과 보고

현재 추진중인 교량 및 도로 건설공사와 관련하여 신규 구간에 대한 도시고속도로 교통관리시스템 확대 구축 및 정보연계방안 마련을 위한 소통회의를 실시하고 결과를 보고드림

Ⅰ		회의개요

□ 일  시 : ‘14.10.16 10:00 ~ 12:00

□ 장  소 : 교통정보센터 5층 회의실

□ 참석자 : 시 도로정보팀장외 6명, 시설공단 교통정보처 유지팀장외 6명

□ 회의주제 : 도로기반시설 설치관련 교통관리시스템 구축방안 검토

① 신설(확장) 도로구간에 대한 교통정보시스템 확보 검토

② 민자도로 사업구간 정보연계방안 검토

③ 사업별 시스템 구축 시기

Ⅱ		회의내용

□ 도로사업 추진현황

사업 주체	연 번	사업명	사업구간	연장 (Km)	시행청	사업비용 (백만원)	사업기간	개통시점
서울시	1	구리암사대교	강동구 암사동 ~ 구리 아천동	2.74	서울시도시 기반시설본부	348,600	‘06.04 ~ ‘15.05	‘14년 11월
	2	동부간선 확장	월계1교 ~ 의정부 시계	6.85		383,500	‘07.10 ~ ‘16.12	‘16년 12월
	3	월드컵 대교	영등포구 양평동 ~ 마포구 상암동	1.98		176,000	‘10.03 ~ ‘19.12	‘19년 12월
민간	4	용마터널	구리 아천동 ~ 중랑구 면목동	3.5	용마터널 주식회사	186,400	‘09.06 ~ ‘14.11	‘14년 11월
	5	구리-포천 고속도로	중랑구 망우동 ~ 남양주 별내면	50.5	서울북부도로(주)	145,600	‘12. 06 ~ ‘17.06	‘17년 06월

□ 교통관리시스템 설치 및 연계방안

도로(교량)명	구축방법	구축비용	구축물량	구축시기
구리암사대교	신규설치	550백만원	VDS 2, 루프 9, CCTV 1 VMS 1	’15년
용마터널	정보연계		소통, 돌발, 영상연계(자가망)	‘15년
동부간선 확장	신규설치	938백만원	VDS 5, 루프 4, CCTV 2, VMS 1	‘16년
구리포천간고속도로	정보연계	840백만원	소통, 돌발, 영상연계(자가망)	‘17년
월드컵대교	신규설치		VDS 7, CCTV 1	‘19년
계		2,328백만원	VDS 14, 루프 13, CCTV 4, VMS 2

□ 검토결과

○ 시 발주사업 : 도로(교량)건설 발주부서에서 교통관리시스템 포함설치

- 구리암사대교 : 도시기발시설본부, 도로계획과와 재협의 진행 중(‘10년 기 협의        완료)으로 구축비용 증액을 통해 VMS 1대, 용마터널 연계비용 추가반영 요구

※ 장비설치 전 연계정보 활용방안 검토(교통정보센터, KT 광역교통정보)

- 동부간선확장

․ 1공구(1.4km), 3공구(2.2km) : 이설(원인자 공사) 진행

․ 2공구(3.2km) : 도로신설 구간으로 신규 구축 협의(‘14.10월 중)

- 월드컵대교 : 서부간선도로 지하화 사업과 연계하여 협의예정(‘14.11월 중)

○ 민자 사업 :기본적으로 정보연계 하되, 비용은 각 기관별 부담

- 용마터널 : 용마터널 주식회사와 연계추진 중(‘14.10 기 협의완료)

․ 연계정보 : 소통, 돌발정보, 영상정보

․ 연계방법 : 구리암사대교 교통관리시스템 구축시 인접한 용마터널관리                       사무소까지 광자가망 연장

․ 구축비용 : 구리암사대교 교통관리시스템 구축비용에 포함

※ 구리암사대교 교통관리시스템 구축예산 확보 실패시 임대망으로 연계 및 강남         순환고속도로 설치공사에 반영 추진

- 구리‧포천간 고속도로 : ‘16년 교통정보연계 협의예정

․ 연계정보 : 소통, 돌발정보, 영상정보

․ 연계방법 : 임대망

․ 구축비용 : 자체 예산편성

Ⅲ		향후계획

□ ‘14.10 : 동부간선확장, 구리암사대교 교통관리시스템 설치 협의

□ ‘14.11 : 월드컵대교 교통관리시스템 설치 협의

□ ‘15년.상반기 : 용마터널 교통정보 연계 추진

□ ‘16년 : 구리,포천간 고속도로 교통정보 연계 추진

붙임 : 소통회의 발표자료 1부.  끝.