	남부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(1회) 시행

1. 우리사업소에서 시행중인『2014년도 도로시설물 세척용역』에 대한 설계변경(제1회)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 도로시설물 세척용역(남부)

나. 용역기간 : 2014. 4. 2 ~ 2015. 2.28

다. 도 급 자 : (주)미동기술 대표  이 상 복

라. 설계변경 내역                              (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	비 고
총 용 역 비		130,706,700	143,242,000	12,535,300
도급비	공 급 가 액	118,824,273	130,220,000	11,395,727
	부가가치세	11,882,427	13,022,000	1,139,573
	계	130,706,700	143,242,000	12,535,300

마. 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물일상유지보수, 시설비 (143,242,000)

바. 변경사유 : 상도터널 방음판 세척작업 추가시행에 따른 물량 및 도급비 증액

첨부   1) 설계변경 사유서 1부.

2) 설계변경 도서 1부.   끝.

주무관	금종융		시설보수과장	김찬구		남부도로사업소장	10/22 代송재우
협조자	계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-4366	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 도림로 145 (대림동) 남부도로사업소(시설보수과)	/
전화	02-3284-5466	/전송	02-836-3093	/	kum2072@seoul.go.kr	/	대시민공개