다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	십자성마을 대표(박국희)
(경유)
제목	에너지자립마을 조성사업 계획 변경승인(십자성마을)

1. 십자성마을-01(2014.10.22)호와 관련입니다.

2. 귀 단체(마을)에서‘14년 에너지자립마을 조성사업 계획에 대해 내용 변경을요청하여 아래와 같이 승인하오니 사업추진에 만전을 기해 주시고, 아울러 보조금관리시스템 세부사항 변경과 보조금 정산 및 자부담 예산집행에도 철저를 기해주시기 바랍니다.

〇 사 업 명 : 십자성 에너지 자립마을 조성

〇 총사업비 : 154,730천원(보조금 51,000천원, 자부담 103,730천원)

〇 변경승인 내용

십자성 에너지자립마을 견학코스 정비 사업의 일환으로 마을 진입로 보안등  교체비용을 책정하였으나, LED 교체작업이 관련 부서와의 협의 등 사업추진상 어려움이 있어 에너지자립마을 안내간판 설치를 위한 자산취득비로 사업계획을 변경함을 승인함

- 변경사업비 승인내역 -

(단위: 원)

세부사업명	예산비목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증 감 (B-A)	사유 및 산출내역
(소계)		29,000	29,000	0
자립마을 견학코스 정비	시설비	29,000	27,000	감2,000	․ 마을진입로 LED교체비용
	자산취득비	0	2,000	증2,000	․ 안내간판 설치 : 1,000천원*2개 = 2,000천원

(끝)

	서 울 특 별 시 장
주무관	연흥모		시민참여기획팀장	하동준		에너지시민협력반장	10/22 정희정
협조자
시행	환경정책과-17984	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 서소문별관 12층 에너지시민협력반	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-3587	/전송	02)2133-3580	/	yeonhm@seoul.go.kr	/	대시민공개