문서번호	주차계획과-13817
결재일자	2014.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
고광호		김종상	10/22 안석진
협조

경부제3녹지

지하주차장 건설 예산배정 검토

2014. 10.

도시교통본부

(주차계획과)

경부 제3녹지 지하주차장 건설 예산배정 검토

영등포구로 부터 공동주차장 건설을 추진하고자 『경부제3녹지 지하 주차장 건설』사업에 편성된 사업비 배정 요청에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 사업개요

○ 위    치 : 영등포구 영등포로 407일대 (신길동 70-50)

○ 규      모 : 지하1~2층, 121면  (대지 : 2,352.48㎡)

○ 사 업 비 : 9,040백만원 (시비 3,018.5, 구비 6,021.5)

당초 사업비 : 6,037백만원 (시비 3,018.5, 구비3,018.5)

○ 사업기간 : ′13. 8. ~ ′15. 12.

Ⅱ.  그간 추진 경위

○ ′13. 4. : 주차장 건설계획 수립 (영등포구)

○ ′13. 5. : 투자심사 완료 (조건부)

- 조건 : 보행자 안전, 차량상충 등을 감안한 진출입구에서 인접 교차로 간 이격거리 확보 등 효율적 운영방안 강구하여 추진

○ ′14. 4. 10 : 도시관리계획(도시계획시설:주차장) 결정

○ ′14. 8. 22 : 기본 및 실시설계용역 완료

○ ′14.10.15 : 대방동 “스페이스 살림” 복합개발 관련부서 회의

○ ′14.10.    : 공사 발주

Ⅲ. 세부 검토 내역

□ 분야별 사업비

(단위 : 백만원)

구 분		사업비	시비	구비	착공예정	비고
계		8,872	3,018.5	5,853.5
공사 내역	토 목	1,663	831.5	831.5	′14.10
	건 축	3,003	1,501.5	1,501.5
	이설비	1,617	-	1,617
	관급자재	2,589	685.5	1903.5

□ 예산배정 검토

○ 요청공문 : ′14년 주차장 건설사업(경부제3녹지 지하공동주차장) 예산배정  요청(영등포구 주차문화과-19167, 2014.9.18)

○ 사업비 배정 현황(자치단체 자본보조)

(단위 : 백만원)

구 분	계	′13년	′14년			′15년이후	비고
			계	기배정	금회배정
계	8,872	-	7,454	-	7,454	-
시 비	3,018.5	-	1,600.5	-	1,600.5	1,418
구 비	5,853.5	-	5,853.5	-	5,853.5	-

〈부서별 의견〉

부 서 명	의 견	비고
서울시 여성가족재단	- 경부제3녹지 지하주차장 건설과는 대방역지하차도가 있어 연결통로 구축 및 대방동 스페이스살림과의 거리가 있어 연계가 어려움	여성가족 정책담당관
공공 개발센터	- 대방동 미군기지(스페이스 살림)개발은 대방역과 연계한 종합적인 보행 활성화 방안을 강구한 것으로 경부제3녹지 지하주차장 건설사업과는 관련이 없음
자산 관리과	- 경부제3녹지 지하주차장 건설부지 지상에 건물 신축이 불가하다는 조경과 의견을 감안하면 연계개발은 종결된 것으로 봄
조경과	- 시설녹지 지상부에 건물 등 신축은 “도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙 제18조(녹지의 설치 및 관리기준)의 규정에 의거 불가 ․상기지역은 철도에서 발생하는 소음, 먼지 등으로부터 생활환경 확보하고자 수목으로 녹지를 조성할 계획임.
하천 관리과	- 경부제3녹지 지하주차장 건설지역은 상습침수구역으로 관리하고 있지 않는 곳으로 저류조 설치는 불필요함

※ 종합의견

- 관련 법령상 시설녹지 지상부에 건물 등 신축은 불가하고, 지하 저류조 설치도   불필요한 지역이므로

- 지하 공동주차장 건설은 당초 계획대로 추진하되, 지하 공동주차장 지상부   녹지조성 사업 시행시 대방역과 연계한 보행 활성화 방안강구

□ 검토 의견

○ 영등포구 경부제3녹지 지하 공동주차장 건설 관련하여 기본 및 실시설계  용역과 시 계약심사(′14. 9) 완료하고, 대방동 “스페이스 살림” 복합개발에 대한 관련부서 협의(회의) 한바, 계획대로 추진하는 것으로 검토되여

○ 공사가 원활하게 이루어질 수 있도록′14년 편성된 시비1,600.5백만원을    배정함이 타당하다고 사료됨.

붙임 : 관련서류 1부.(별도)