문서번호	토목부-20559
결재일자	2014.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
손준호		권혁대	10/23 노우성
협조
	주무관		이석우

응봉삼거리 교차로 개선 검토보고

(응봉교확장 및 성능개선공사)

2014.10.

도시기반시설본부

(토  목  부)

『응봉교 확장 및 성능개선공사』

응봉삼거리 교차로 개선 검토보고

서울성동경찰서로부터 금호동에서 행당동 한신아파트 방향으로 직진 차로가 없어 시민 불편사항 있는 응봉삼거리 교차로 개선요청이 있는바 이에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 성동경찰서 교통과-2855(‘14. 04.11.) : 교통안전시설 개선설치 요청

○ 응봉감 제‘14-257호(’14.10. 6.) : 응봉삼거리 교차로개선공사 실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 성동구 응봉동 ~ 성수동 (응봉교)

○ 규    모 : 확     장 - 폭4차로 → 6차로, 연장 625m

성능개선 - DB18 → DB24

○ 사업기간 : 2008.10.20. ~ 2015.12.31.

○ 총사업비 : 78,536백만원 [도급비 : 46,455백만원]

○ 감 리 사 : (주)건화 외1      ○ 시 공 사 : 한신공영(주) 외1

Ⅲ		감리단 보고내용

○ 성동경찰서로부터 응봉삼거리 교차로 개선 요구

- 현재 응봉삼거리 금호동 방면에서 왕십리쪽으로 좌회전 차선만 있고 행당동 한신아파트 방향으로 직진차로가 없어 응봉교 하부도로를 이용하여 우회하고 있는 실정으로 집단민원이 성동경찰서에 야기되고 있는 실정임.

- 성동경찰서로부터 응봉삼거리 교차로의 규제심의를 완료하고 우리 본부에 공사시행을 요청한 사항임.

○ 응봉삼거리 주변 교통 현황

직 진 불 가

○ 공사시행의 필요성

- 경찰서에서 요청한 직진차로를 신설함으로 지역주민 민원해소 및 교통안전 사고 우려도 크게 저하될 것으로 예상됨으로 교차로 개선은 타당한 것으로 판단됨.

- 다만, 금회 교차로 개선공사는 본 공사구간과 인접하고는 있으나 공사구간내는 아님.

○ 주요 공사내용

- 교통섬 축소 및 경계석, 보도 재포장

- 노면표시 및 신호기 이설 등

※ 세부 공사내용 및 교통처리 계획(별첨 도면참조)

○ 주요 수량 증․감 현황

구 분	단 위	수 량		증․감	비 고
		당 초	변 경
응봉삼거리 교차로개선공사	식	-	1	증) 1

○ 공사비 증․감 현황                        (단위 : 천원, 부가세포함)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
도급비	교차로 개선공사 (부대토목)	-	16,477	16,477
	교차로 개선공사 (노면표지)	-	2,082	2,082
	제요율적용제외공종 (설계비 외)	-	7,698	7,698
	소 계	-	26,257	(증) 26,257

○ 적용단가 검토

- 신규 산출단가(품셈)  : 협의율 적용[(69.747+100)/2=84.874%]

- 실적공사비 단가는 최저가 현장으로 100% 적용

※ 신규비목 단가에 대하여 상기와 같이 공사계약일반조건 제20조 2항에 의거 협의율 적용함이 타당함.

Ⅳ		조 치 계 획

○ 감리단 보고내용을 검토한바 공사의 필요성 및 설계내역이 타당한 것으로 판단되는 바 추후 설계에 반영하여 정산코자 합니다.

붙  임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.