문서번호	정수시설과-7222
결재일자	2014.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
고재연		현인식	10/23 代남상규
협조
	주무관		윤지원

설계변경 보고서

[풍납취수장 침사지 준설공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

영등포아리수정수센터

풍납취수장 침사지 준설공사 설계변경 보고

풍납취수장 침사지 준설공사의 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경을 시행하여 공사준공에 만전을 기하고자 함

용역현황

공 사 명 : 풍납취수장 침사지 준설공사

공사개요

- 준설 1,159㎥

공사기간 : 2014. 09. 23 ~ 2014. 11. 21

도 급 액 : 47,153,110원

도 급 자 : 진명환경산업(주) 대표자 정 옥 채

보고내용

설계변경 사유

- 시공물량 증 ․ 감에 따른 설계변경

․ 시공물량(증감) 현황

공 정	규 격	단 위	구 분	수 량	증․ 감
침사지 준설		㎥	당 초	1,150	감) 56
			변 경	1,094

- 상기와 같이 현장여건에 따른 준설량 물량 감 발생에 따른 설계변경

- 설계심사 이행 실태 순회점검(‘14.10.20~21) 지적사항 반영

※ 고용보험율 0.88%에서 0.87% 적용(7등급), 감액 2,908원

- 제경비 납부 정산에 따른 감액

․ 건강보험료(279,754원 → 0원) 미 납부로 감액

․ 연금보험료(409,758원 → 0원) 미 납부로 감액

공사비 변경내용

구 분	금 액		증, 감	비 고
	당초금액	변경금액
도 급 비	47,153,110	45,606,000	감) 1,547,110

검토근거

공사계약 일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금약 조정)

지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제39조 내지 제42조 및 건설기술관리법 제26조 5 제3항 및 같은법 시행규칙 제28조 2조의2에 의거 사후정산

처리의견

상기 공종별 물량변동 등에 대한 설계변경건에 대하여 건설공사 설계변경 심의 및 준공 처리절차 운영계획에 의거 설계변경 심의위원회를 개최하고 결과에 따라 준공 처리코자 합니다.

따로붙임 : 설계변경 내역서 1부. 끝.