문서번호	정수시설과-7223
결재일자	2014.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
고재연		현인식	10/23 代남상규
협조

설계변경 심의워원회 개최 결과보고

[풍납취수장 침사지 준설공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

영등포아리수정수센터

설계변경 심의워원회 개최 결과보고

풍납취수장 침사지 준설공사 시행중 물량 증․감 및 신규공정 발생에 따른 설계변경 사유가 발생하여 자체 심의위원회를 개최하고 심의결과를 보고드림

공사현황

공 사 명 : 풍납취수장 침사지 준설공사

공사개요

- 준설 1,159㎥

도 급 액 : 금47,153,110원

착 공 일 : 2014. 09. 23

준공기한 : 2014. 11. 21

도 급 자 : 진명환경산업㈜ 대표자 정 옥 채

심의위원회 심의결과

위 원 장 : 정수시설과장

위    원 : 시설6급 김왕주외 3명, 간사 1명

일    시 : 2014.10.23(목) 11:00 ~ 12:00(2층 사무실)

안    건 : 풍납취수장 침사지 준설공사 설계변경 적정성 여부 및 내역 검토

심의결과 : 적정함

심의위원회 심의내용

시공물량 증 ․ 감에 대한 적정성 검토

제경비 산출, 적용 적정성 검토

제경비 정산(보험료 정산 등) 적정성 검토

변경 용역비

구 분	금 액		증, 감	비 고
	당초금액	변경금액
공급가액	42,866,464	41,460,000	감) 1,406,464
부가가치세	4,286,646	4,146,000	감) 140,646
도 급 비	47,153,110	45,606,000	감) 1,547,110

조치의견

위와 같이 시공물량 변동 및 신규공종 발생으로 인한 설계변경을 자체 심의위원회 심의결과에 따라 설계변경코자 합니다.

따로붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 심의 의견서 1부. 끝.