투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	9호선 2단계 정보통신설비(관제전화) 연동시험 협조요청

1. 9호선 2단계 정보통신설비 구축 업무에 적극 협조하여 주신데 대하여 감사드립니다.

2. 9호선 2단계 관제전화설비 구축을 위한 2단계 시험 및 1단계 연동을 위한 종합시험계획을 따로붙임과 같이 통보하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 관제전화설비 시운전 세부일정

구분		작업일자	비고
구간	내용
2단계	장비반입/설치	09.29 ~ 10.03	기 반입 설치완료
	본/역사시험	10.27 ~ 10.31	귀 운영사와 협의 일정 조정 가능함
	결과보고	10.30 ~ 10.31
1단계	본/역사 시험	11.03 ~ 11.21
	결과보고	11.20 ~ 11.21
통합	1/2단계 모니터링	11.24 ~ 12.19
	결과보고	12.15 ~ 12.19

따로붙임 : 1. 9호선 2단계 관제전화설비 연동시험계획서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울시메트로9호선(주) 대표이사,서울9호선운영(주) 사장
주무관	박규영		정보통신과장	이용기		도시철도설비부장	10/23 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-9634	(		)	접수		(		)
우	100-731	서울 중구 서소문로 89 순화빌딩 12층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개