함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	물품변경계약체결[암사정수장 계측제어설비 제작구매 설치]

1. 생산부 기전설비과-7114(2014.10.20)호와 관련입니다.

2. 『암사정수장 계측제어설비 제작구매 설치』에 대한 변경계약을 별첨과 같이 조달계약 의뢰하고자 합니다.

가. 계약자 : **************

나. 계약금액                                         (단위:원)

구분	당 초	변 경	증 감
전체	719,000,000	678,718,000	감40,282,000
3차	122,450,000	82,168,000	감40,282,000

다. 계약기간 (변동없음)

● 전체분 2010.10.14.~2014.10.30.

● 3차분  2014.04.06.~2014.10.30.

라. 준공기한 변경사유

- 밸브제어방법개선으로 통신방식변경됨에 따라 외함물량삭제, 배수펌프 추가로 레벨스위치 수량증가에 따른 변경.

붙임 : 1. 물품계약수정요청서 1부.

2. 합의서 및 검토보고서 등 각 1부.  끝.

★주무관	박은미		재무회계과장	채규평		요금관리부장	이종욱		상수도사업본부부본부장	10/23 정득모
협조자
시행	재무회계과-13750	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동27-1)	/
전화	02-3146-1232	/전송	02-3146-1209	/	shsarang@seoul.go.kr	/	부분공개(7)