함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(침전지 전단 정류벽외 1개소 벽면보수공사)

1. 우리 정수센터에서 시행중인 『침전지 전단 정류벽외 1개소 벽면보수공사』와 관련하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공사개요

○ 공사명 : 침전지 전단 정류벽외 1개소 벽면보수공사

○ 도급자 : 홍용종합건설 주식회사 대표 이춘택

○ 도급비 : 76,020,200원

○ 공사기간 : 2014.4.28. ~ 2014.10.24

나. 설계변경

○ 설계변경 금액

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증·감액(원)
도 급 비	76,020,200	81,620,000	증5,599,800

○ 설계변경사유

- 공종별 계약물량 증․감 및 보험료 정산에 따른 변경

다. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

붙 임 : 1. 설계변경 심의 위원회 개최결과 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

주무관	박광수		정수시설과장	박심근		구의아리수정수센터소장	10/24 오세영
협조자	주무관	신상용
시행	정수시설과-2591	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 광나루로 571(구의동)	/
전화	02-3146-5480	/전송	02-3146-5409	/	mylu81@seoul.go.kr	/	대시민공개