투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2013년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 재시공지시 및 감리의뢰 통보

1. 감사담당관-14549(2014.10.14.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소와 계약 체결하여 시행하였던『2013년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사』에 대하여 「도로시설물 안전·유지관리실태 감사」결과 노면표시 재귀반사성능 기준미달사항이 적출되어 공사설명서 3.1.1, 3.1.2 규정에 따라 아래와 같이 재시공 지시하오니 노면표시 시방기준에 적합하도록 재시공하시기 바랍니다.

3. 아울러, 감리용역업체는 공사시행에 따른 감리업무에 철저를 기하여 동 사업이 원활히 추진될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

공 사 명	2013년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)-서부

- 시공자 : (주)대한로드라인페인트  대표 강완혁

- 감리사 : (주)영호이앤씨 대표 정숙영

[재시공 작업지시]

1. 작업기간 : 2014. 10. 24 ∼ 2014. 11. 30

2. 공사금액 : 105,590천원

3. 재시공 지시내용

- 작 업 위 치 : 마포구 수색로(수색교~덕은교) 외 5개소

- 공종 및 물량 : 노면표시 도색 및 제거   L= 31,509m

붙 임 : 1. 재시공 작업지시 설계내역서 1부.

2. 재시공 작업지시 수량산출서 1부.

3. 재시공 작업지시 설계도면 각 1부.    끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	(주)대한로드라인페인트,(주)영호이앤씨
주무관	권세봉		도로보수과장	10/24 이규철
협조자	주무관	이상하
시행	도로보수과-9532	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울특별시 마포구 가양대로 203(상암동 825번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8354	/전송	300-8364	/	se1212@seoul.go.kr	/	대시민공개