다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	서대문구청장(교통행정과장)
(경유)
제목	금화터널 주변 도로안내표지 설치 추가예산 재배정

1. 교통행정과-45547(2014.10.22.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 금화터널 주변의 도로안내표지 신설에 따른 추가예산을 아래와 같이 재배정 조속히 완료되도록 하여 주시기 바랍니다.

가. 예산 재배정내역

(단위 : 원)

예산과목			재배정부서		누계재배정액	기재배정액	금회재배정액		비 고 (관련공사명)
부서 정책 단위	세부사업	통계목
도시교통본부 (교통운영과) 도시교통체계 및 소통개선 교통소통 및 안전관리강화	도로교통 소통 개선사업	시설비 (401-01)	서대문구	교통 행정과	35,114,000	31,630,000		3,484,000	금화터널 도로안내표지 설치

나. 추가 재배정 사유 : 표지판 기초공사 주간에서 야간공사로 변경(서대문경찰서 요청)

ㅇ 예산 변경 : 8,000,000원 → 11,484,000원(증 3,484,000원)

붙임 : 예산 재배정부 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	양해선		교통운영팀장	심혁보		교통운영과장	10/24 강진동
협조자	주무관	김수정		실무사무관	이문주
시행	교통운영과-19875	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15번지 서울시청 별관 1동 6층 교통운영과	/
전화	02)2133-2446	/전송	02)2133-1053	/	www.seoul.go.kr	/	대시민공개