문서번호	교통정보센터-15574
결재일자	2014.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		버스정보팀장	교통정보센터장
이민화		임철수	10/24 이경순
협조

「2014 버스정보시스템 확대구축 사업」

착수․자문회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

교통정보센터

(버스정보팀)

「2014 버스정보시스템 확대구축 사업」

착수․자문회의 결과 보고

대중교통 이용 활성화를 위한 2014년 버스정보안내단말기 확대 설치사업의 착수보고 및 자문회의를 개최 결과를 보고 드림

개  요

○ 일  시 : 10. 22.(수) 16:00 ～ 17:00

○ 장  소 : 서소문별관 7층 교통정책과 회의실

○ 참석자 : 총 14명

- 서울시 : 도시교통본부장, 교통운영관, 교통정보센터장, 버스정책과. 버스정보팀 3명

- 자문위원 : 서울대학교 이청원 교수

- 시공사 : ㈜비츠로시스 5명

- 감리사 : ㈜대영유비텍 1명

○ 진행 순서

- 서울시 BIS 개요 및 BIT 설치현황 보고(버스정보팀장)

- 2014년 BIT 확대설치 추진계획 보고(시공사 PM)

- 서울시 BIT 확대설치 사업 관련사항 자문

- 본부장 및 국장 지시(당부) 사항 전달

○ 착수보고 사진

주요내용

○ BIT전원 인입 공사

- 지하매설 인입 수전을 원칙으로 하되, 굴착승인 불가 등 불가피한 곳은 가공으로 병행 시행

- 서울시 보도블록 10계명을 준수하고 당일굴착․당일복구로 보행자 불편 최소화

○ 운영 및 유지관리 방안

- 버스정보안내단말기 상태정보 실시간 감시 및 장애대응 체계마련

- 향후 유지관리를 위한 기술교육 및 기술이전 실시

○ 특별제안 및 기술협상

- BIT 3개소 추가설치 및 7개소 이전 설치

- 서울대중교통 앱 시각장애인을 위한 기능개선, 기타 사용불편사항 개선

자문 및 지시사항

참석자	내 용
이청원 교수	•일반 사용자 입장이 아닌 시각장애인이 검토하여 앱 개선 필요 •서울대중교통 앱 실사용자 후기를 조사하여 먼저 기능개선 추진 •BIT 장애유형 통계 분석 후 기능개선 및 운영 •단말기에 표출내용이 너무 많아 사용자에게 불필요한 정보 많이 제공 •도착알림 소리만 나게 하는 방안 검토 필요
도시교통본부장	•BIT 설치요청은 많고 예산은 적으니 단가를 낮춰 최대한 많이 설치 할 수 있도록검토 •BIT 단가를 낮출 수 있는 여러방법을 검토해 볼 것
교통운영관	•준공 전이라도 BIT는 설치 즉시 운영되도록 할 것 •굴착 시 현장관리를 철저히 하여 보행자 불편이나 민원 등 소홀함이 없도록 할 것

향후일정

○ 2014.10. ~ 2014.11. : 단말기 제작, 도로굴착 및 전기인입공사

○ 2014.12.1 ~ 2014.12.15. : 단말기 설치 및 정보표출 개시

○ 2014.12.16 ~ 2014.12.31. : 기술 이전 및 사업 준공

붙   임 : 착수보고서 1부.  끝.