투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 체결 - 한강 이촌권역 자연성 회복사업 소규모 환경영향평가 용역

1. 생태공원과-2440(2014.10.24.)호와 관련입니다.

2.『한강 이촌권역 자연성 회복사업 소규모 환경영향평가 용역』건에 대하여 다음과 같이 변경계약하고자 합니다.

가. 계약현황

계 약 명	계약업체	계약금액(원)	계약기간
한강 이촌권역 자연성 회복사업 소규모 환경영향평가 용역	주식회사 대영이이씨	40,402,000	2014.5.30. ~ 10.26.

나. 변경내역                                             (단위 : 원)

구 분	변경 전	변경 후	변경사유
준공기한	2014.10.26	2014.12.26.	한강 이촌권역 자연성 회복사업 기본 및 실시설계 용역 지연 등

다. 귀책소재 및 지체상금 부과 여부

- 귀책소재 : 한강사업본부

- 지체상금 : 미부과

붙임 : 변경계약 요청 의뢰서 일체.  끝.

주무관	이재승		총무과장	최대봉		총무부장	전결 10/24 서영관
협조자
시행	총무과-16194	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	existwin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)